문서번호	건축부-19320
결재일자	2020. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김성		유현수	11/16 이창구
협조
	인력개발과장		김현중

-속초공무원수련원 증축 및 리모델링-

설계용역 계약변경 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(시설국건축부)

- 속초공무원수련원 증축 및 리모델링 -

설계용역 계약변경 검토보고

「속초공무원수련원 증축 및 리모델링 설계용역」관련, 서울시 공공건축조정위원회의 결정(추가설계비지급:전원합의)에 따른 추가과업수행으로 용역금액 조정이 필요하여 검토 보고 드림.

1		용역개요

○ 용 역 명 : 속초공무원수련원 증축 및 리모델링 설계용역

○ 위    치 : 강원도 속초시 노학동 721-3 외 1

○ 규    모 : 지상2층∼지상4층, 연면적 11,487㎡

(리모델링 1,530㎡, 증축 8,355㎡ 포함))

○ 주 용 도 : 교육연구시설

○ 설 계 사 : *********************

○ 계약금액 : ***********************

○ 설계기간 : 2019. 7. 30. ~ 2020. 9. 16(1차연장:50일 포함)

2		추진경위

○ ’19.07.30. : 설계용역 착수

○ ’19.02.     : 소규모지하안전영향평가 용역발주 및 계약

○ ’19.06.     : 중간설계 완료

○ ’19.07.17. : 건설기술심의 완료

○ ’19.09.04. : 속초시청 건축허가 완료

○ ’19.09.28. : 건설기술심의 완료

○ ’19.11.05. : 재무국 계약심사 사전검토 완료

3		계약변경 검토

○ 관련근거

- 지방자치단체 용역계약 일반조건 제6절 과업내용의 변경과 계약금액 조정

- 공공발주사업에 대한 건축사 업무범위와 대가기준 제8조 제1항 2호

- 실시설계 재검토에 따른 추가과업 설계변경 요청

[(주)솔토지빈건축사사무소 ST-2020-1106-1호, ’20.11.6.)

○ 변경내용

구분	당 초	변 경	증 감	비고
용역금액	**************	**************	**************
용역기간	’19.7.30.~’20.9.16.	’19.7.30.~’20.9.16.	변경없음

※ 상세내역 붙임문서 참조

○ 변경사유 : 추가과업 수행(도시공간개선단 요구사항 반영)

***************************************************************************************************************

- *******************************************************************************

- ************************************************************************************************************

※ 서울특별시 공공건축조정위원회 개최(2019.7.29.(월))

******************************

4		처리의견

○ ******************************************************************************************************

5		향후계획

○ ’20. 11.              : 설계용역 준공

붙 임 : 1. 계약변경 요청 관련서류(설계자). 1부

2. ‘19년 제1차 서울시 공공건축조정위원회 개최결과 1부.  끝.