문서번호	녹색에너지과-30588
결재일자	2020. 11. 17.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

		시 민
주무관	신재생에너지팀장	녹색에너지과장
이종원	김광찬	11/17 김호성

어린이대공원 연료전지 부지 원상복구 용역 계획

2020. 11.

기후환경본부

녹색에너지과

어린이대공원 연료전지 부지 원상복구 용역 계획

건물용 연료전지 보급 확대를 위해 추진된 어린이대공원 연료전지 실증사업 종료에 따른 주기기 이송 및 부지 원상복구 용역 발주

Ⅰ		추진근거

□ 건물용 수소연료전지 설치계획(본부장 방침, ’10.10.27.)

○「2030 그린디자인 서울」마스터플랜에 따른 수소연료전지

보급목표 달성을 위해 50~200kW 중형 연료전지 전략적 육성

○ 어린이대공원, 서북병원 내 100kW급 2기를 서울시 구매·설치, 제조사는 5년간 연료비 및 유지관리비 부담하며 실증 실시

※ 서북병원 설비는 기기 이상으로 2014년 철거 완료

□ 건물용 연료전지 실증사업 종료 및 조치계획(녹색에너지과-18181호, ’19.7.16.)

○ 현재 가동 불가 상태인데, 실증용 제품이기에 주요 소모품을 맞춤 제작 등 수리비용 과다소요(10억원 이상) 예상되므로, 재활용 불가 및 폐기를 위한 시가감정 불필요

○ 기술유출 문제 등을 이유로 주기기 처리는 제조사(현 한국퓨얼셀)에서 하기로 하고, 주기기를 제조사의 공장(포항)으로 이송

※ 당초 포스코에너지에서 제작·설치하였으나, ’19.11월 포스코에너지에서 연료전지 부분 분할해 한국퓨얼셀 설립

Ⅱ		용역계획

□ 용역개요

○ 용 역 명: 어린이대공원 연료전지 주기기 이송 및 원상복구 용역

○ 사업예산: 40백만원

- 추정액(붙임2 견적서 기준): ****************

- 예산과목: 녹색에너지과, 에너지절약과 생산으로 원전하나 줄이기, 신재생에너지 보급, 공공시설 신재생에너지 보급-지역지원, 사무관리비(201-01)

○ 용역기간: 계약일로부터 20일

- 11월 중순 발주 의뢰 ⇒ 12월 초 완료 예정

○ 위    치: 광진구 능동 18, 서울어린이대공원 내

○ 용역내용(상세내용 붙임3 참조)

- 연료전지 주기기를 분리, 제조사의 공장으로 이송

※ 공장위치: 경북 포항시 북구 홍해읍 열일만산단로88번길 153

- 연료전지 설비 주기기 거치대 및 부대설비 철거 후 원상복구

□ 용역 발주계획

○ 계약방법: 전자공개 수의계약

- 사유: 「지방계약법」 시행령 제25조에 따라 총액 5천만원 이하 공사, 용역은 전자방식(조달청 나라장터)으로 2인 이상 견적서를 받아 하한율 이상 최저가격 제출자와 계약 체결

- 방법: 재무과에 계약 발주 의뢰

○ 제한사항: 지역제한, 업종제한

- 원활한 용역 수행을 위해 주된 영업소 소재지가 서울, 인천, 경기 소재 업체로 한정

- 연료전지 주기기 및 부대설비가 고정된 구조물 해체가 수반되므로, 「건설산업기본법」에 따른 비계·구조물해체공사업 면허소지업체로 한정

○ 기타사항

- 주기기의 크기(가로6.7×세로2.9×높이3.4m)와 무게(23톤)를 고려, 주기기 이송을 전문 운송업체에 위탁 가능하도록 함

- 주기기 하역은 제조사의 공장의 장비(크레인)를 이용하므로,

하역에 필요한 장비 대여 비용은 사업비에서 제외

- 주기기 내 포함된 폐촉매 등 지정폐기물은 제조사에서 처리

붙임  1. 건물용 연료전지 실증사업 종료 및 조치계획 1부.

2. 견적서 1부.

3. 위치도 및 용역 범위, 현장사진 1부.

4. 과업내용서 1부.  끝.