문서번호	녹색에너지과-30589
결재일자	2020. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에너지정책팀장	녹색에너지과장
전정재		진선영	11/17 김호성
협조

- 서울시 태양광 사진 DB 제작 용역 -

계약변경 검토보고

2020. 11. 13.

- 서울시 태양광 사진 DB 제작 용역 -

계약변경 검토보고

‘건물일체형 태양광(BIPV)’들을 추가촬영함에 따라 당초 예상된 계약금액보다 집행금액이 증가되어 계약금액 변경 사항을 검토, 보고드림

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 서울시 태양광 사진 DB 제작 용역

○ 계약기간 : 2020. 6. 22. ~ 2020. 11. 20.

○ 계약금액 : 16,000,000원(금천육백만원) ※부가가치세 포함

○ 주요 과업내용

- 서울지역에 설치된 태양광 발전시설 200개소 내외 촬영

- DB용 사진과 사진집용 사진 분류 및 보정

- 태양광 사진과 조화되는 카피라이터 문안 작성

○ 수행업체 : ************************

□ 계약 변경

○ 변경 내용 : 계약금액 변경

구 분	당 초	변 경	비고
*******	***********	***********	***********

○ 변경 사유

- 서울시의 ‘건물일체형 태양광(BIPV)’ 보급 노력을 적극 홍보하기 위한 촬영 대상지 추가 선정에 따른 과업추가로 증액

BIPV(Building-Integrated Photovoltaic, 건물일체형 태양광) : 태양광 모듈을 건축물에 설치하여 건축 부자재의 역할 및 기능과 전력생산을 동시에 할 수 있는 태양광 설비로 창호, 스팬드럴, 커튼월, 이중파사드, 외벽, 지붕재 등 건축물을 일부 또는 완전히 둘러싸는 벽, 창, 지붕 형태를 말함

□ 향후 일정

○ 대상지 현장조사 및 촬영                     : ’20년 11월

○ 편집 및 카피라이터 문안 작성                : ’20년 11월

○ 검수 및 태양광 사진집 인쇄 및 배포          : ’20년 12월

- 사진 DB : 시 홈페이지 게재, 슬라이드 형식으로 제작하여 시·구 행사 등에 활용

- 사 진 집 : 시, 자치구 에너지 관련 부서, 시의회, 국가기록원 등에 배부

붙임  1. 산출내역서(변경 전후)각 1부

2. 합의각서 1부.  끝.