문서번호	한양도성도감-11617
결재일자	2020. 11. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이		곽동진	11/18 안중호
협조

<한양도성 성벽 보수정비 공사>

설계변경 검토보고

2020. 11.

문 화 본 부

한양도성도감

한양도성 성벽 보수정비 공사 설계변경 검토보고

한양도성 성벽 보수정비 공사에 다음과 같이 변경사항이 있어 제출된 실정보고 사항에 대한 검토 결과를 보고 드림

공사개요

○ 공 사 명 : 한양도성 성벽 보수정비 공사

○ 공사기간 : ‘20. 8. 24. ~ 12. 21.

○ 계약금액 : 금 56,104,190원

○ 시 공 자 : ㈜재우씨엔씨********

추진경위

○ ‘20. 02. 03. : 한양도성 숙정문 주변시설 및 성벽 보수 정비공사 추진계획

(한양도성도감-1193호)

○ ‘20. 03. 06. : 설계용역 착수

○ ‘20. 03. 12. : 대공방어협조구역내 문화재보수공사 협의 완료

○ ‘20. 05. 28. : 문화재청 설계승인(조건부 승인, 문화재청 수리기술과-2373호) ※ 붙임참조

○ ‘20. 05. 29. : 설계용역 준공

○ ‘20. 08. 24. : 한양도성 성벽 보수정비 공사 착공

○ ‘20. 09. 24. : 현장 기술지도 자문회의 개최

○ ‘20. 11. 13. : 시공자 실정보고 제출

검토내용

○ 공사기간 변경 : 변동 없음

○ 계약금액 변경 : *******************************************

※ 실정보고 단가 적용기준

- 신규비목 : 실정보고 기준일(2020년 11월) 산정단가 ×낙찰률 적용(89.196%)

- 기존비목 물량증감 : 계약단가

○ 설계변경 사유

- 성벽 보수정비공사 착공 후 현황 조사 결과 당초 설계된 풍화성돌 이외에 파손되거나 풍화가 상당히 진행된 성돌이 추가 발견되어 성벽의 보호 및 시민의 안전을 위해 설계변경 추진하여 보수정비 하고자 함

1) 공사 내용 변경 : 풍화 및 파손 정도를 파악하여 풍화성돌 교체 수량 조정

- 물량 변경 : 교체수량 증가 및 이와 연동된 해체 및 쌓기, 다듬기 등 물량 증가

① 백악구간

공종	변경전	변경후	검토 결과
마름돌 해체	0.78㎥	1.09㎥	물량 추가
마름돌 쌓기	0.78㎥	1.09㎥	물량 추가
화강석 반입	0.86㎥	1.2㎥	물량 추가
정다듬	6.44㎡	9.89㎡	물량 추가
혹두기	5.51㎡	8.07㎡	물량 추가
도편수	2.47인	3.34인	물량 추가
인력소운반	4.52㎥	10.6㎥	물량 추가(설계누락)

② 남산구간

공종	변경전	변경후	검토 결과
강관조립말비계 (이동식) 설치 및 해체	11회	20회	물량 추가
마름돌 해체	1.42㎥	2.62㎥	물량 추가
마름돌 쌓기	1.42㎥	2.62㎥	물량 추가
화강석 반입	1.56㎥	2.88㎥	물량 추가
정다듬	18.94㎡	26.08㎡	물량 추가
혹두기	14.01㎡	19.29㎡	물량 추가
도편수	4.61인	6.71인	물량 추가

2) 보험료 등 정산

- 보험료 정산 및 고용개선지원비 정산(고용개선지원비 미 적용으로 정산)

공종	변경전	변경후	증감액
산재보험료	1,040,949	1,456,358	415,409
고용보험료	242,795	339,686	96,891
국민 건강 보험료	952,087	-	-952,087
국민연금 보험료	1,284,675	-	-1,284,675
노인장기요양보험료	97,588	-	-97,588
고용개선지원비	1,667,725	-	-1,667,725
단말기임대비	1,250,000	-	-1,250,000

변경 내역

○ 원가계산서

구 분		당 초	변 경	증 감(-)	비 고
순공사원가	재료비	1,659,554	2,343,021	683,467
	노무비	27,907,487	39,044,454	11,136,967
	경비	10,084,743	11,537,573	-2,334,350	보험료 정산 등
순공사비 계		39,651,784	52,925,048	1,452,830
일반관리비		2,379,107	3,175,502	796,395
이윤		6,055,194	8,058,542	2,003,348
고용개선지원비		1,667,725	-	-1,667,725	미적용
단말기임대비		1,250,000	-	-1,250,000	미적용
공급가액		51,003,810	64,159,092	13,155,282
부가가치세		5,100,380	6,415,908	1,315,528
도급액		56,104,190	70,575,000	14,470,810
총공사비		56,104,190	70,575,000	14,470,810

예산상 조치

○ 계약금액 변경 : *******************************************

○ 예산과목

1. 기존 계약금액

- 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존‧정비, 한양도성 보수‧정비, 시설비****************

2. 변경(증액) 금액

*************************************************************************************

검토자 의견 및 향후 계획

○ 설계도서 검토 결과 및 현장 여건을 반영한 내역으로, 원활한 사업추진을 위해 계약변경 의뢰하고 상기의 변경 사항으로 계약 변경 후 공사 시행

붙임  1. 시공자 실정 보고 공문 1부

2. 시공자 실정 보고(설계변경) 1부.  끝.