투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(설계서간 상이사항 조정 등 실정보고 승인통보_남산예장자락 재생사업)

1.업무지시현장 : 남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장) 케이비아이산업개발 주식회사

, 남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장) 안산조경개발 주식회사, 남

산예장자락 재생사업(공원 및 주차장) 주식회사 동성엔지니어링, 남산

예장자락 재생사업(공원 및 주차장) 주식회사 태원산업건설

2.작 성 일 자 : 2020-11-18 09:11:32

3.지 시 내 용

가. 남산예장 감리 제2020-633호(2020.11.17.)와 관련입니다.

나. 우리시에서 추진중인 남산예장자락 재생사업과 관련하여 설계서간 상이사항 조정 및 누락수량 반영 등 실정보고 건에 대하여 건설사업관리단에서 검토한 내용대로 승인 통보하오니, 공사추진에 차질이 없도록 품질 및 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

다. 아울러, 최종 설계변경에 따른 계약금액 조정은 향후 우리 본부 설계변경 관련 절차에 따라 조정될 수 있음을 알려드립니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							장도영			의료시설과장					代장도영					건축부장					11/18 代유현수
협조자
시행			건축부-19495									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		2133-7114						/전송			2133-0750					/	dyjang77@seoul.go.kr												/	부분공개(5)