문서번호	조경과-14862
결재일자	2020. 11. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경협력팀장	조경과장
유승아		김상주	전결 11/18 문길동
협조

2020 스마트가든 조성사업 변경계획

2020. 11.

푸른도시국

[조  경  과]

2020 스마트가든 조성사업 변경계획

국립중앙의료원 스마트가든 조성 중 병원 사정으로 인해 조성 개소수가 축소됨에 따라 공공기관(선유도공원)으로 변경 추진코자 함

□ 국립중앙의료원 스마트가든 조성 개요

○ 대 상 지 : 국립중앙의료원

○ 사업내용 : 관수, 조명, 공조 제어 시스템 도입 실내정원 조성

○ 조성규모 : 스마트가든 2개소(큐브형 1, 벽면형 1) 조성

○ 사 업 비 : *******************

○ 시행주체 : 중구(공원녹지과)

□ 현재까지 추진경위(‘20. 11. 18. 기준)

○ ‘20. 06. 19. : 코로나19 대응 의료기관 대상 스마트가든 수요조사 요청(산림청 → 市조경과)

○ ‘20. 06. 22. : 수요조사 시행(市조경과 → 코로나 19 대응 의료기관)

○ ‘20. 06. 26. : 신청서 제출(국립중앙의료원 → 市조경과)

○ ‘20. 08. 27. : ’20 스마트가든볼 설치사업 국고보조금 교부 결정알림

(산림청 → 市조경과)

○ ‘20. 09. 16. : 예산 재배정(조경과 → 중구)

○ ‘20. 11. 13. : 스마트가든 변경신청 알림

[국립중앙의료원 현대화시설팀-2952호(’20.11.13.)호]

□ 변경내용 및 사유

○ 변경 내용 : 조성 개소 수 변경 (큐브·벽면 각 1개소 → 벽면형 1개소)

○ 변경 사유

- 코로나 19 관련 의료비품 보관으로 큐브형 설치 예정 장소에 조성 불가능

- 식물 유지관리에 대한 부담 등

□ 대상지 변경 계획 : 국립중앙의료원 1개소 → *********

○ 변경 계획 : 국립중앙의료원 포기 물량(큐브형, 1개소)을 **********

○ 변경(선정)사유

**************************************  **********************

*******************************************************************************

□ 추진일정

○ ‘20. 11. 18.    : 예산 감 재배정(市 조경과 → 중구)

○ ‘20. 11. ~ 12. : 설계 및 공사 시행 완료(동부녹지사업소)

○ ‘20. 12. ~      : 사후관리 시행

□  행정사항

○ 조속한 사업 시행 및 연내 집행 완료*******

붙임 : 국립중앙의료원 사업변경 공문  1부.  끝.