투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	2020년 경춘선숲길 환경개선사업 완수기한 연기 의뢰

1. 북서울꿈의숲관리사무소-4998호(2020.11.17.)와 관련입니다.

2.『2020년 경춘선숲길 환경개선사업』에 대하여 아래와 같이 완수기한 연기를 의뢰합니다.

가. 사 업 명: 2020년 경춘선숲길 환경개선사업

나. 대 상 지: 경춘선숲길 일대

다. 사업기간: 2020. 8. 24. ~ 11. 21.

라. 용 역 비: *******************************

마. 계 약 자: ****************************

바. 완수기한 연기기간

1) 당   초: 2020. 8. 24. ~ 11. 21.

2) 변   경: 2020. 8. 24. ~ 12. 11.

사. 사업기한 연기사유: 현장여건 상이로 인한 절대 공기 부족, 수종변경으로 인한 설계변경 등으로 부득이한 연기

아. 연기사유 귀책소재: 중부공원녹지사업소

자. 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  1. 완수기한 연기 보고서 1부.

2. 완수기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	북서울꿈의숲관리사무소장
주무관	송석주		운영팀장	김완수		북서울꿈의숲관리사무소장	11/18 이정수
협조자
시행	북서울꿈의숲관리사무소-5003	(		)	접수		(		)
우	04514	서울시 강북구 월계로 173(번동 산28-6) 북서울꿈의숲관리소 방문자센터 2층	/
전화	02-2289-4026	/전송	02-2289-4040	/	ssens@seoul.go.kr	/	부분공개(6)