문서번호	급수운영과-17855
결재일자	2020. 11. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
최박		임인택	11/18 한희선
협 조

마천지구 시설물 인수인계 미추진 사항 보고

2020. 11.

강동수도사업소

급수운영과

마천지구 상수도시설물 인수 ․ 인계 미추진 사항 보고

2013년 택지개발이 조성된 마천지구 국민임대주택단지 조성공사와 관련하여 상수도 시설물 인수인계가  추진되지 않고 있는 사항에 대하여 다음가 같이 조치 하고자 함.

※관련공문: 배수과-10643(2020. 11. 16.)

Ⅰ		사업개요

□ 사업 개요

❍ 사업명: 마천국민임대주택단지조성사업

❍ 공사기간: 2005. 5.~2010. 12.

❍ 시행청: SH공사

❍ 위치: 서울시 송파구 마천동 일원

❍ 인수인계 시설물

- 상수도관 관로 D80~D250㎜, L=2,066m

- 상수도 밸브실(제수밸브: 17개,  퇴수밸브: 3개)

□ 마천지구 상수도시설물 인계인수 경위

❍ 2013. 12. 20.: 마천지구 상수도시설물 인수인계 요청

❍ 2014. 1. 14.: 마천지구 상수도시설물 현장점검

- 제수밸브 17개중 4개가 미발견, 퇴수밸브는 3개 미발견, 밸브실 뒤틀림,     철개 뒤틀림, 밸브실 침수 등 확인.

❍ 2014. 1. 15.: 마천지구 상수도 시설물 인수인계 요청에 따른 현장점검

결과 통보

- 조치사항: 제수밸브 4개소, 퇴수밸브 3개소 위치 확인 후 설치 및 상태               불량한 밸브실 재시공 요청

❍ 급수운영과(2014. 1. 15.)호와 관련하여 현장 점검 결과를 통보하였고,확인이 되지 않는 해당 시설물과 상태불량 시설물을 재점검 및 재시공 요청

Ⅲ		행정사항 및 향후계획

□ 행정사항

❍ SH공사에 미비사항 보완요청 및 상수도시설물 합동 점검후 시설물 이상 없을 시 인계·인수 통보

❍ GIS시스템 속성 및 자료 요청

붙임  마천지구 관련서류 1부.  끝