문서번호	현장민원과-17537
결재일자	2020. 11. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	현장민원과장	강서수도사업소장
서주태	추경민	11/18 정진일

- 수도계량기 교체공사 -

설계변경(정산) 심의위원회 개최결과 보고

2020. 11.

강서수도사업소

(현장민원과)

- 수도계량기 교체공사 -

설계변경(정산) 심의위원회 개최결과 보고

우리사업소에서 시행한 재질불량 수도계량기 교체공사와 관련하여

설계변경(정산) 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 강서수도사업소 관내 수도계량기 교체공사

○ 도 급 자 : ************

○ 공사기간 : 2020. 7. 29. ~ 2020. 11. 15.

○ 공사내용 : 재질불량계량기 교체

- 당초 : 9,069개

- 변경 : 8,845개

○ 공사금액 변경내역

구 분	금 액(원)		증·감(원)	비 고
	당 초	변 경
도 급 액	***********	***********	***********	교체물량 감소, 재경비 정산

▢ 변경사유 및 세부내용

○ 설계변경 사유

- 당초 교체대상 9,069개 중 공사발주 후 폐전철거 등으로 교체물량 33개 감소

- 옥내배관 노후, 장애물적치, 수용가 부재 등 교체장애로 191개 미교체

- 제경비 정산 등

○ 설계변경 세부내역

- 변경 공사개요

단위 : 개)

공 종	계량기 구경
	구분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm
계량기 교체	당초	9,069	7,938	150	360	432	189
	변경	8,845	7,774	134	337	420	180
	증·감	감)224	감)164	감)16	감)23	감)12	감)9

- 교체물량 감소 내역

(단위 : 개)

구분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm
계	224	164	16	23	12	9
폐전철거 등	33	27	-	3	2	1
교체장애	191	137	16	20	10	8

‣교체장애수전 191개(옥배배관 노후 131, 장애물 적치 58, 수용가 부재 2)

▢ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일    시 : **********************

○ 장    소 : *********

○ 심의내용 : ************************

○ 심의위원

- 위원장 : ******

- 위  원 : ************

- 간  사 : ********

○ 검토결과 : ***********************

▢ 행정사항

○ 설계변경 심의위원회 개최결과에 따라 설계변경을 시행하고 행정지원과로 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙임 1. 설계변경 심의결과서 1부.

2. 설계변경 관련 문서(내역서 포함) 1부.  끝.