문서번호	시설보수과-9569
결재일자	2020. 11. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
권순회		오재영	11/18 김영철
협조

-2020년 도로시설물 세척용역-

설계변경(제2회) 시행보고

2020. 11

서부도로사업소

시설보수과

2020년 도로시설물 세척용역

설계변경(제2회) 시행보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 ‘2020년 도로시설물 세척용역’에 대한 설계변경(제2회) 정산사항에 대하여 보고드림.

근 거

○ 도로시설물 세척용역 하반기 작업계획 보고 : 시설보수과-5461(‘2020. 7. 6)호

용역개요

○ 용 역 명 : 2020년 도로시설물 세척용역

○ 대상시설 : 64개소(터널6, 지하차도12, 고가14, 일반교량30, 입체교차2)

○ 용역기간 : 2020. 3. 13 ~ 2020. 12. 31

○ 용 역 비 : 1,600,000,000원

○ 계 약 자 : 서일개발㈜ 대표 이동기

추진경위

○ 2020.02.25 : 세척용역 발주

○ 2020.03.13 : 용역계약 및 착수

○ 2020.4~11월 : 1~8차 작업 시행

설계변경 내역 검토

○ 세척물량 증·감 내역

공 종 별		당 초	변 경	증·감
터널 및 지하차도	타일	390,086㎡	374,645㎡	감 15,441
	콘크리트면	337,489㎡	328,771㎡	감 8,718
	난간	13,536㎡	10,677㎡	감 2,859
	보도 바닥면	19,026㎡	16,330㎡	감 2,696
	방음판	53,252㎡	44,344㎡	감 8,908
	터널 내 등기구	5,023개	10,046개	증 5,023
교량고가	난간, 방호벽 등	11,982㎡	12,352㎡	증 370

○ 용역비 변경내역(“용역비 변경없음“)

(단위/원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	계	1,600,000,000	1,600,000,000	-
	공급가액	1,454,545,455	1,454,545,455	-
	부가가치세	145,454,545	145,454,545	-

○ 예산과목

-  도로시설관리, 터널시설관리(도시개발특별회계), 도로시설물(터널,복개,지하차도,세척) 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

향후계획

○ ‘20. 11월 : 설계변경 및 변경계약

○ ‘20. 12월 : 용역 준공

붙임 : 2020년 세척용역 설계변경(제2회) 내역서 1부.  끝.