“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	뚝도아리수정수센터
수신자	정수과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고(통보)(자양취수장 조류차단막, 오일휀스 철거, 설치 및 이물질 제거공사)

1. 정수과-9279(2020.11.18. 변경계약 의뢰) 호와 관련입니다.

2. 「자양취수장 조류차단막, 오일휀스 철거, 설치 및 이물질 제거공사」 건에 대하여 다음과 같이 변경계약 체결되었음을 보고(통보) 합니다.

가. 계 약 명 : 자양취수장 조류차단막, 오일휀스 철거, 설치 및 이물질 제거공사

*******************************

다. 변경계약일자 : 2020. 11. 18.

라. 변경내역

구 분	변 경(전)	변 경(후)	증.감
도급비	43,791,000원	40,981,000원	감)2,810,000원

마. 변경사유 : 시공물량 증감 및 제경비(정산보험료) 납부 정산에 따른 감액

붙임  공사변경계약서 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	김효영		행정관리과장	박진기		뚝도아리수정수센터소장	11/18 代박진기
협조자
시행	행정관리과-11526	(		)	접수		(		)
우	04519	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가 642-1)	/
전화	3146-5512	/전송	3146-5508	/	khy5912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)