코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(한양도성 성벽 보수 정비 공사)

1. 한양도성도감-9506(2020.9.18.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인 「한양도성 성벽 보수정비 공사」에 대한 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 계약건명 : 한양도성 성벽 보수 정비 공사

- 계약업체 : ㈜재우씨엔씨*********************

- 계약금액 : ******************************

나. 변경내용 : 계약금액 변경

구분	변경전	변경후	비고
계약금액	************	************	*************
계약기간	**********************	**********************	변경없음

※ 변경사유 : 한양도성 성벽 보수정비공사 착공 후 현황 조사 결과 당초 설계된 풍화성돌 이외에 파손되거나 풍화가 상당히 진행된 성돌이 추가 발견되어 성벽의 보호 및 시민의 안전을 위해 설계변경 추진하여 보수정비 하고자 함

다. 예산과목

- *******************************************************************

********************************************

붙임  1. 방침서 1부

2. 공사계약 변경 사유서 1부

3. 합의각서 1부

4. 설계 변경 내역서 1부

5. 녹색제품 구매적용 가능 검토서 1부.  끝.

	한양도성도감과장
★주무관	구선이		도성보존팀장	곽동진		한양도성도감과장	11/18 안중호
협조자	환경교육팀장	류희영		계약총괄팀장	김대진
시행	한양도성도감-11631	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2672	/전송	2133-1063	/	ungum9@seoul.go.kr	/	부분공개(5)