문서번호	공원시설과-4723
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
이병철		최연호	11/19 김인숙
협 조

- 2020년 한강 수영장(물놀이장) 유지보수 공사 -  실정보고서(여의도 수영장 성인․청소년풀 보수) 검토 보고

2020. 11.

한강사업본부

(공원시설과)

- 2020년 한강 수영장(물놀이장) 유지보수 공사 -

실정보고서(여의도 수영장 성인․청소년풀 보수) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「2020년 한강 수영장(물놀이장) 유지보수 공사」의 감독기관(서울시설공단)에서 제출한 실정보고서 검토결과를 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 서울시설공단 공사감독1처-7784( ̓̕20.11.17.) : 공사실정보고서

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2020년 한강수영장(물놀이장) 유지보수 공사-토목

○ 대    상 : 한강공원 야외수영장 토목공사 분야

- 수 영 장 : 3개소(뚝섬, 광나루, 여의도)

- 물놀이장 : 2개소(난지, 양화)

○ 공사기간 :  ̕20. 4. 29. ～ 12. 31.

○ 공사주요 내용

- 탑코팅 2,531㎡,

- 폴리우뢰아 방수 3,681㎡

- 도막형바닥재 2,633㎡

- 보도블록 1,370㎡

- 기타 1식

○ 도 급 비 : ***************

○ 계 약 자 : ******************

○ 감독기관 : ***************

□ 실정보고 내용

○ 여의도 수영장 성인․청소년풀 노후 수조바닥 전면보수

(여의도 수영장․ 성인․청소년풀 수조 바닥이 노후로 인해 타일 들뜸 및

파손이 전반적으로 발생됨에 따라 이용시민의 안전사고 발생 우려가

높고 향후 지속적인 유지관리를 위하여 타일제거 및 방수방식 시행)

-  타일제거 1,983㎡

-  콘크리트 열화단면제거 : 215㎥

-  고압물청소 : 2,145㎥

-  콘크리트 단면보수 : 215㎥

-  폴리텍 다기능복합방수(T=30mm) : 2,145㎥

-  폐기물 상차 : 23.3㎥

○ 변경 세부내역

구분	공 종	규 격	단위	수 량			순공사비(천원) 증· 감
				당초	변경	증감
여의도	타일제거		㎡	-	1,983	증) 1,983	증) 47,588
	콘크리트 열화단면 제거	T=30mm	㎡	-	215	증) 215	증) 4,168
	고압물 청소		㎥	-	2,145	증) 2,145	증) 2,402
	콘크리트 단면보수	T=30mm	m	-	215	증) 215	증) 26,922
	폴리텍다능복합방수	바탕처리포함	㎡	-	2,145	증) 2,145	증) 125,654
	폐기물 상차비		㎥	-	23.3	증) 23.3	증) 86

○ 공사비 : 증 326,770천원

□ 검토 결과

○ 본 실정보고 사항은 여의도 수영장 성인․청소년풀의 노후된 타일이 전반적으로 들뜸 파손으로 안전사고 발생 우려가 높아 지속적인 유지관리를 위하여 전면보수를 실시하는 것으로 적정하다고 판단됨.

□ 조치 계획

○ 수영장 유지보수 공사 추진 중 시설관리공단에서 제출한 실정보고서에

대하여 검토의견과 같이 승인하고 공사의 시급성을 감안, 우선 시공 조치하고 향후 설계변경에 반영하도록 시설관리공단에 통보

붙임 : 공사현장 실정보고서 검토보고 1부.  끝.