문서번호	공원시설과-4724
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
이병철		최연호	11/19 김인숙
협 조

- 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 -

실정보고서(광나루수영장 수조바닥 보수) 검토 보고

2020. 11.

한강사업본부

(공원시설과)

- 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 -

실정보고서(광나루수영장 수조바닥 보수) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「광나루 잠원 수영장 노후상수관로 교체공사」의 감독기관(서울시설공단)에서 제출한 실정보고서 검토결과를 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 서울시설공단 공사감독1처-7820( ̓̕20.11.17.) : 공사실정보고서

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 광나루 잠원수영장 노후 상수관로 교체공사

○ 대    상 : 광나루, 잠원수영장

○ 공사기간 :  ̕20. 7. 6. ～ 21. 5. 30(1차분 7.6~12.31).

○ 공사주요 내용

- 상수관로 교체 : 3,49m,

- 보도블록 포장 : 21,822㎡

- 화강판석 설치 : 364㎡

- 기타 관로용접 등 1식

○ 도 급 비 : *************************************

○ 계 약 자 : ********************

○ 감독기관 : ***************

□ 실정보고 내용

○ 변경 내용

-  광나루 수영장 노후 수조바닥 보수

(광나루 수영장 수조 바닥이 노후로 인해 타일 들뜸 및 파손이 전반적으로

발생됨에 따라 이용시민들의 안전사고 발생 우려 높고, 향후 지속적인

유지관리를 위하여 타일제거 및 방수방식 시행)

· 타일제거 : : 1,814㎡

· 바탕고르기제거 : 1,541.9㎡

· 콘크리트 열화단면제거 : 272.1㎡

· 고압세척 : 1,814㎡

· 단면보수 : 272.1㎡

· 바탕고르기 : 1,541.9㎡

· SUP 패널 붙이기 : 1,814㎡

· 폐기물상차 : 177.8㎡

-  SUP 패널 품질확보를 위하여 동절기(12~2월) 공사중단

○ 변경 세부내역

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ *****************

□ 검토 결과

○ 시설공단으로부터 제출받은 검토보고서에 대하여 검토한 결과 광나루 수영장 수조의 노후 들뜸 파손으로 안전사고 발생우려가 높고, 지속적 파손발생으로 유지관리를 위하여 전면적인 보수를 실시하는 것이 적정한 것으로 판단되며,

○ SUP 패널의 시공품질을 위한 동절기 공사중단 및 절대 공기부족등으로 향후 설계변경시 1차공사 기간 변경 시행 필요

□ 조치 계획

○ 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 추진 중 시설관리공단에서 제출한 실정보고서에 대하여 검토의견과 같이 승인하고 우선 시공 조치하고 추후 설계변경에 차질없도록 서울시설공단에 통보

붙임 : 공사현장 실정보고서 검토보고 1부.  끝.