문서번호	사회적경제담당관-14407
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		사회적경제기반조성팀장	사회적경제담당관
지관우		신동헌	11/19 고광현
협조

사회적경제 먹거리클러스터 설계 및 공사계획

2020. 11.

사회적경제담당관

사회적경제 먹거리클러스터 설계 및 공사계획

가락시장 인프라를 활용 사회적경제기업 육성을 위한 가락동 사회적
경제 먹거리 클러스터 조성 설계용역 및 공사용역을 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

○ 서울시 사회적경제 기본조례 제15조(시설비 등 지원) 및 제16조(재정지원 등)

○ 사회적경제 먹거리클러스터 조성 및 운영계획(2020.10.11.)

- 사회적경제 먹거리 클러스터 조성계획 변경(2020.11.11.)

Ⅱ		공간조성계획

○ 소 재 지 : 가락시장 청과동(’85년 준공)

서울시 송파구 양재대로 932

○ 사용면적 : 1,130㎡, 약342평

○ 공    간 : 약26개 공실(사무공간)

○ 소 유 자 : 서울시 농수산식품공사

○ 사용계획 : 먹거리분야 사회적경제기업 입주 및 공유 공간 제공

입주자간 협업, 마케팅 활성화 프로그램 지원

1구역(151㎡)

2구역(422㎡)

3구역(443㎡)

□ 공간 조성계획

○ 총  괄

구 분	전용면적	용 도	비고
1구역	151㎡	입주기업 사무공간 5실
2구역	422㎡	입주기업 사무공간 14실
3구역	433㎡	사무공간 2실 공유공간(258㎡, 약75평)	사경센터 운영
공동작업장	115㎡	공유주방 1실

○ 1구역/2구역 : 소형 사무공간 임대

- 전용면적 : 573.42㎡(약173평)

- 사용계획 : 19개 기업(4~6인) 사무공간, 1실당 30.1㎡(약9평)

○ 3구역(일부) : 중형 사무공간 임대

- 전용면적 : 184.44㎡(약56평)

- 사용계획 : 2개 기업(8~10인) 사무공간, 1실당 46.1㎡(14평)

○ 3구역 : 공유공간 운영

- 전용면적 : 350.98㎡(약106평)

- 사용계획 : 관리사무실, 회의실, 탕비실, 다목적실 등 공유시설 활용

○ 공동작업장(공유주방) 조성

- 위치 및 면적 : 청과동 3층내 별도공간(D동), 114.75㎡(약35평)

- 사용계획 : 먹거리 창업기업이 시제품 개발 및 식품 가공을 할 수 있는 공동작업장(주방) 조성‧운영

Ⅲ		설계 및 공사용역 시행계획

□ 공간설계용역

○ 용 역 명 : 사회적경제 먹거리클러스터 실시설계 및 인테리어 설계

○ 용역기간 : 계약일로부터 30일 이내

○ 과업주요내용

- 건축, 기계, 전기 및 정보통신 등의 기본·중간·실시 설계

- 각종 심의 등 행정업무 및 기타 과업수행에 필요한 업무

○ 발주방법 및 근거

- 계약방법 : 수의계약

- 사유 : 추정가격 2천만원 이하소액으로, 전문 설계업체와 계약을 진행하고자 함

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

************************************

********************

***********************************************************************************************************

□ 공간조성 공사용역

○ 용 역 명 : 사회적경제 활성화공간 조성공사 용역

○ 용역기간 : 계약일로부터 80일 이내

○ 과업주요내용

- 실내건축, 기계, 전기, 소방, 정보통신 등 해당시설 인테리어 공사

○ 발주방법 및 근거

- 계약방법 : 경쟁입찰

- 근거법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조

※ 전기공사업법 제11조 및 정보통신공사업법 제25조에 의거 전기·정보통신공사는 분리발주

□ 사후설계감리(또는 디자인감리)

○ 추진목적

- 설계자의 디자인 등 설계의도가 충분히 반영토록 공사과정중 설계자를 참여시켜 의도구현 및 품질향상 ※ 도시기반시설본부 건축부-3706호(행정2부시장 방침 제58호)

○ 추진기간 : 공사착공일로부터 공사종료 15일까지

○ 추진방법 : 수당지급 또는 수의계약

Ⅳ		소요예산 및 추진일정

□ 소요예산 : 321백만원

○ 공간 설계용역 : 20백만원

- 예산과목 : 사회적경제 지속가능성 제고 및 사회적가치 구현, 자조기반강화, 공공자산의 사회적경제 활용 활성화, 시설비(401-01)

○ 공간 조성공사 : 295백만원

- 예산과목 : 사회적경제 지속가능성 제고 및 사회적가치 구현, 자조기반강화, 공공자산의 사회적경제 활용 활성화, 시설비(401-01)

○ 공사 감리 : 6백만원

- 예산과목 : 사회적경제 지속가능성 제고 및 사회적가치 구현, 자조기반강화, 공공자산의 사회적경제 활용 활성화, 감리비(401-02)

□ 추진 일정

○ 설계용역 계약 및 설계	: ’20.11월

○ 인테리어 공사 발주 및 추진	: ’20.12월 ~  ’21.1월

○ 인테리어 공사 준공 및 개관	: ’21.1월말

따로붙임  1. 설계용역 과업내용서(안) 1부.

2. 설계용역 내역서 1부.  끝.