문서번호	운영과-8012
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
이수민		최영효	11/19 정훈모
협조
	주무관		이도훈

2020년 중랑물재생센터 2처리장 수처리분야 기계설비 긴급정비(연간단가)

설계변경 및 정산 검토보고

2020. 11.

중랑물재생센터

(운 영 과)

2020년 중랑물재생센터 2처리장 수처리분야 기계설비 긴급정비(연간단가)

설계 변경 및 정산 보고

｢2020년 중랑물재생센터 2처리장 수처리분야 기계설비 긴급정비(연간단가)｣와 관련하여 설계 변경 시행 및 정산을 검토 보고드림.

□ 사업개요

□ 사 업 명: 2처리장 수처리분야 기계설비 긴급정비(연간단가)

□ 공사기간: 2020.2.13. ~ 2020.12.31.

□ 계약업체: 다린전력(주)(대표: 오승한)

□ 계약금액: 263,430,730원(금이억육천삼백사십삼만칠백삼십원)

□ 변경내용

□ 1~4차 작업에 따른 세부 공사 내역 변경

□ 계약금액 및 계약기간은 변경 없음

※ 변경 내역은 설계변경내역서 참고

□ 검토의견

□ 노후된 현장 시설물 상황에 따라 유동적으로 긴급 정비 공사를 진행하여 공사 내역이 변경되었음

□ 붙임과 같이 설계 내역을 변경코자 함

□ 행정사항 및 향후 계획

□ 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

붙임 1. 관련 공문 1부.

2. 설계변경내역서 1부

3. 합의각서 및 사유서 1부.  끝.