문서번호	현장민원과-18028
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	북부수도사업소장
김동건		代고승석	11/19 박동석
협조

- 수도계량기 교체공사 -

설계변경(준공정산) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

북부수도사업소

(현장민원과)

- 수도계량기 교체공사 -

설계변경(준공정산) 검토보고

우리사업소에서 추진중인 『수도계량기 교체공사』와 관련 물량변경에 따른 설계변경 사항과 주휴수당 지급, 경비항목인 국민건강보험료, 국민연금보험료 등 제경비 등 정산사항에 대하여 다음과 같이 검토하고 보고합니다.

Ⅰ		관련법규 및 근거

□ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제22조, 시행령

제74조,시행규칙 제73조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

□ 지방자치단체 공사계약일반조건 Ⅵ(공사의 설계변경)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 북부수도사업소 수도계량기 교체공사

□ 공사위치 : 북부수도사업소 관할지역 내

□ 규    모 : 소형 수도계량기 6종 9,986개

□ 공사기간 : 2020.08.04 ∼ 11.21.(착수일 ∼ 110일)

□ 공사금액 : 220,396,000원

□ 시 공 사 : **************

□ 예산과목 : 수도계량기 교체, 수선유지교체비, 급수계량기교체비

Ⅲ		설계변경 검토내용

□ 교체장애 발생에 따른 물량 변경

◯ 노후앵글밸브,부재, 빈집, 위치불명 등 교체장애 발생 물량감소

- 당초 : 9,986개,  변경 : 7,162개

※ 미교체 : 2,824개 (교체장애 : 2,187개, 폐전·기 교체 등 : 637개)

□ 주휴수당 반영, 건강, 연금 보험료 등 제경비 실정산

◯ 주휴수당 반영, 보험료(산재,고용, 건강,연금,노인장기요양 등)

증빙자료 및 산업안전보건관리비 미지출에 따른 제경비 정산

Ⅳ		설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		설 계 변 경 금 액			비고
		당 초	변 경	증·감
총공사비		220,396,000	163,867,000	-56,529,000
도급비	공급가액	200,360,000	148,970,000	-51,390,000
	부가가치세	20,036,000	14,897,000	-5,139,000
	계	220,396,000	163,867,000	-56,529,000

Ⅴ		조치계획

□ 상기와 같이 공사물량 변경 및 제경비 실정산을 반영하여 설계변경

하고자 함.

붙임 1. 변경설계서 1부.

2. 정산증빙자료 각 1부.

3. 설계변경 제비율검증 1부.

4. 합의서 1부.

5. 계량기 교체내역 1부.

6. 교체장애내역 1부. 끝.