문서번호	건축부-19606
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	부분공개(5)

주무관	의료시설과장	건축부장			결재
장도영	차무흥	11/19 代유현수
협 조	주무관		한영석
	주무관		고병준

- 남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장) -

설계변경자문 소위원회 상정보고

문서번호		요청부서		도시기반시설본부		요청일		2020년 11월 18 일
공 사 명	남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)
공사개요	공사규모		공원(16,373㎡), 주차장 지하1층, 도로 교통체계 개선(L=564m)
	공사기간		2017년 8월 31일 ~ 2020년 12월 31일
	감 리 사		(주)동성엔지니어링 외 2개사
	설 계 사		(주)시아플랜건축사무소
	시 공 사		KBI산업개발(주) 외 3개사
자문 안건명			설계변경 및 계약금액의 적정성 자문				요청금액		**********
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
********** ****** ********************* **************************************************** ************ ******************************************* ******************* ************************************* ************** ************************************* ***************** **************************
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 별도 의견 없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
************ ********************** ************* ******************** **************** ************************* ************************					**************** ************************** ************************** ************************* ▪ 설계변경 주요 공종 - 건축공사
별첨서류	1. 공사비 증‧감 내역서 사본 1부. 2. 수량산출서 사본 1부. 3. 도면 사본 1부. 4. 신규공종 단가결정 근거 1부.					▪ 공사예정시기 -2017.8.31 ~ 2020.12.31 ▪ 관급자재 - 금속제 창,

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)
****	*************	계약일	2017.08.22	시공사	KBI산업개발(주) 외3
공사기간	2017.08.31~2020.12.31	낙찰율	80.053%	설계자	(주)시아플랜건축사사무소
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)동성엔지니어링 외2
공사규모	- 공원(16,373㎡) - 주차장 지하1층(버스 39대, 일반차량 2대) - 도로 교통체계 개선(L=564m)			※ 작성자 : 건축부 장도영 (☎ 02-3708-2619)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	변경도서 참조
*******	*****************		******************	*********
*******	***********		*************
설계변경요구자	☑ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	남산예장 감리 제2018-309호(적용 단가협의 합동회의 결과보고)
설계변경 근거	방 침	도시기반시설 본부-건축부-15836 외 4건
	관련규정	공사계약일반조건 제6절 2
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	1. EXPANSION JOINT 삭제 2. 철근커플러 시공 3. 건강지원센터 진입데크 공사 4. 우당기념관 변경공사 5. 설계변경 및 마감변경공사
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

********************************************************************

**********************************************

*****************************************************

***************************************************

***********************************************************

설계변경 자문위원회  귀중