문서번호	교통정보과-16888
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		버스정보팀장	교통정보과장
배성준		조대근	11/19 이수진
협조

「2020년 버스정보안내단말기(BIT) 설치사업_미니형 BIT 설치」 설계변경(정산) 검토보고

2020. 11.

교통정보과

(버스정보팀)

‘20년 버스정보안내단말기(BIT) 설치사업_미니형

설계변경(정산) 검토보고

「2020년 버스정보안내단말기(BIT)설치사업_미니형 BIT 설치」관련으로 준공에 따른 설계변경(정산) 결과를 보고 드림.

1		사업개요

❍ 사 업 명 : 2020년 버스정보안내단말기(BIT) 설치사업_미니형 BIT 설치

❍ 계약금액 : 777,200,000원

❍ 기    간 : ’20. 4.27. ~ 11. 22.

❍ 사업규모 : 미니형 BIT 설치 220개소(제작·설치, 전기공사)

❍ 시행사/감리사 : 한국정보기술(주)/(주)한신엔지니어링

2		추진경과

❍  ’20.  4. 27 : 사업계약

❍  ’20.  4. 28 : 착수보고

❍  ’20.  5. 19 : 선금지급

❍  ’20.  6. 25 : 미니형 BIT 거치형 변경 검토보고

❍  ’20.  7. 30 : 물품⦁전기 등 기자재 승인

❍  ’20.  8. 13 : 품질관리, 제작 상태 공장검수

❍  ’20. 11.17 : 설계변경(정산) 검토보고(감리원)

3		설계변경(정산)내역

❍ 계약금액 유지

구 분	변경 전	변경 후	증 · 감
계약금액	************	************	*

❍ 주요 세부내역 변경 사항                         (단위 : 천원)

연번	변경사항	당 초	변 경	증 감
1	************** ************* ******************* ****************** *********************** ****************	*******	*******	*******
2	****** ************************ ************************* *********************** ****************** **************	*******	*******	*******
3	****	*******	*******	****
4	***	******	******	***
5	*	*******	*******	*****

❍ 변경사유

- 노선도 활용 불가능 및 버스정류소 쉴터 중복 지점 추가 확인으로 인해 기존 7개소에서 39개소 신규 표지판 제작 설치 진행

- 단말기 유형 변경 설치 현장여건 변화로 수전거리 변경에 따른 물량 증감 및 경비 정산 등

- *********************************************

❍ 예산과목

- 과학적인 교통정보서비스구현, 과학적 교통운영체계구축, 버스정보안내단말기(BIT) 설치, (202-401-01)시설비

4		검토결과

❍ 단말기 유형 변경 및 전기공사 추진과정에서 시공사와 감리단의 설계변경 내용 검토결과 타당함

※ 감리단 검토의견 : 설계변경(정산) 적합함

· BIT 설치지점의 실사와 계약내용을 검토한 결과 BIT 유형변경은 적합하고 이에 따른 공사 변경도 적정하므로 설계변경 실정보고는 적합함.

5		조치계획

❍ 재무과에 설계변경 계약의뢰

❍ 준공검사 실시(’20.11.22 준공)

따로붙임 : 감리단 설계변경보고 1부 및 내역서 1부. 끝.