문서번호	설비부-18135
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장
김문호		11/19 김오열
협조
	주무관		박희준

「시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사(2차)」

설계변경 소위원회 심의 요청

2020. 11.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호					요청부서		설 비 부			요청일			2020년 11월 일
공 사 명	시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사(2차)
공사개요	공사규모		지하1층 / 지상4층 , 연면적 2,990.95m2
	공사기간		********************************* **********************************
	감 리 사		*********
	설 계 사		*******
	시 공 사		******
자문 안건명			지상3~4층 바닥 난방공사 신설 및 고용지원개선비 반영									요청금액			***********
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 유지관리 , 사용부서 요구 ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ☑ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항 (요약) - 교통안전시설 심의 이행사항과 설계누락 부분에 대한 설계변경 - 고용지원개선비 추가
책임 건설사업관리기술인 의견(요약) ○ 내용 : - 발주기관의 지시사항에 의한 지상3~4층 난방공사 신설에 따른 전기 추가공사를 검토한 결과 적절한 것으로 사료됨
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 : 지상3,4층 난방공사 신설 및 고용지원개선비 추가 ▪ 물량 증감내역
공 종				품 목		단위		당 초			변 경			증 · 감 금액(천원)
**********				*****		*		*			*			**		******
*******				********		*		**			***			**		******
*******				********		*		*			***			**		******
******				**********		*		**			***			**		******
*********				*******		*		****			*****			**		******
***********				**********		*		***			*****			**		*******
******				******		*		*			**			**		******
**********				*********		*		*			***			**		******
***********				***********		*		*			***			**		******
******				*********		*		*			***			**		******
******				*********		*		*			**			**		******
별첨서류		1. 설계변경 개요 1부. 2. 건설사업관리단 기술검토의견서 사본 1부. 3. 변경내역서 1부. 4. 계약금액조정 검증확인서 1부.							▪ 공사예정시기 : 2021. 02 ▪ 소요관급자재 수배전반경 (400KVA->500KVA) 2. 지상3~4층 분전반 총 2면

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사
계약금액	***************	계약일	2019. 10. 10	시공사	*****
공사기간	**************************	낙찰율	86.747%	설계자	******
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	********
공사규모	지하1층 ~ 지상4층 연면적 2,990.95㎡ 수배전설비(400KVA) , 전등 및 전열설비 , 태양광발전설비(28.28KW) , 발전기(130KW) , 전력 및 조명제어설비 등			※ 작성자 : 김문호 (☎3708-8621)

□ 자문 안건 주요 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	************		******************* *************	************* *************
공 사 비	*********		*********	************
적 용 요 율	낙찰율 86.747%		낙찰율 86.747%
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
협의율 적용 근거	해당없음
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 도시기반시설본부-20-12719
	관련규정	지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 6절 공사계약일반조건 (설계변경)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	1) 지상3~4층 바닥을 초절전 전기 온수관으로 결정되어 이에 따른 전기공사를 반영. 2) 고용지원개선비 (주휴수당 및 건강,연금보험료 지원, 고용개선 장려금) 반영.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

실정보고 승인

· 도시기반시설본부-20-12719(2020.10.19.) 설계변경 실정보고 승인(조건부) 통보