문서번호	설비부-18150
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축설비과장	설비부장
박희준		김은덕	11/19 代여인웅
협조

『서울의료원 권역응급의료센터 증축 통신공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(1회) 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

『서울의료원 권역응급의료센터 증축통신공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(1회) 검토보고

『서울의료원 권역응급의료센터 증축통신공사』와 관련하여, 계약     상대자로부터 물가변동에 의한 계약금액 조정(1회) 요청이 있기에    물가변동 금액 적정 여부를 검토 보고함.

Ⅰ
		관 련 근 거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조, 동법 시행령 제73조, 동법 시행 규칙 제72조

□ 공사계약 일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

□ 동일감리 제20-273호(2020.11.05.)

【물가변동(1회)으로 인한 계약금액 조정 검토결과 보고】

Ⅱ
		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 통신공사

□ 공사기간 : 2019.3.27.~2020.7.30

□ 도 급 액 : 589,611,000원

□ 계약업체 : ㈜세호영상 대표 박석신

□ 건설사업관리단

○ ㈜종합건축사사무소 동일건축,(주)토문엔지니어링 건축사 사무소

□ 계약현황

차 수	계약금액(원)	준공금액(원)	계약기간	비 고
**	***********	*	2019.3.27.~2021.7.30.
***	***********	*	2019.3.27.~2020.12.30.

Ⅲ
		계약금액 조정(ESC) 검토 내용

□ 물가변동(ESC) 조정 조건 충족 여부

구 분	제1회	충족여부	비 고
조 정 방 법	지수조정	충족(계약서 확인)
기 준 시 점 (입찰일)	2019. 3. 20.	충족(90일 이상)	※ 2019.12. 31. 기준 경과기간 278일(충족) 조정률 2.23%(불충족)
비 교 시 점 (조정기준일)	2020. 1. 1.
경 과 기 간	279일
조 정 률	4.18%	충족(3% 이상)

□ 계약금액 조정(제2회) 세부검토 내용

구 분		금 액	비 고
물가변동 대상공사의 계약금액(A)		************
물가변동 적용제외금액 (B)		***********
물가변동 조정기준일 현재공정률	예정공정률	*****
	실행공정률	*****
물가변동 적용대가 (C)		************	C=A-B
물가변동조정률 (D)		*****
물가변동등락 대상 조정금액(E)		***********	E=C*D
물가변동조정적용금액		***********

□ 계약금액 조정 금액

(단위 : 원)

차 수	계약금액	조정금액	증 ․ 감액	비 고
총 차	***********	***********	************
1 차	***********	***********	***********

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 상기와 같이 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역을 검토한 결과, 물가변동 조정 경과기간이 기준시점 일로부터 90일 이상(279일) 경과하고,

○ 지수조정률이 100분의 3이상(4.18%) 증가 되어 관련 규정에 의거 상기와 같이 물가변동 조정금액으로 정함이 타당하다 사료됨.

Ⅳ
		보고자 의견

□『서울의료원 권역응급의료센터 증축통신공사』관련 건설사업관리단의 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회) 검토보고가 적정하다 판단되어 이에 대한 승인 통보 후 변경계약을 진행하고자 함.

붙 임 : 물가변동 관련 계약금액 조정(제1회) 보고 각 1부. 끝.