투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(총차 3회, 2차 1회) 시행 및 변경계약 의뢰(신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역)

우리 부에서 시행 중인「신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차 3회, 2차 1회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

2. 계약금액 : 990,700,000원(2차 254,000,000원)

3. 용역기간 : 2019.3.4. ~ 2021.10.27.(2차 2020.6.14. ~ 2021.1.6.)

4. 계 약 자 : 극동엔지니어링(주) 외 2개사(대표 성낙일)

5. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증·감
계약금액	총차	990,700,000원	1,038,600,000원	증 47,900,000원
	2차	254,000,000원	324,000,000원	증 70,000,000원
용역 기간	총차	2019.3.4. ~ 2021.10.27.	2019.3.4. ~ 2021.7.26.	감 93일
	2차	2020.6.14. ~ 2021.1.6.	2020.6.14. ~ 2021.1.6.	변경 없음

- 변경사유 : 안전 분야 건설사업관리기술자 추가 배치 및 용역기간 변경

6. 예산과목 : 안전총괄실 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 신상도 지하차도 확장, 시설비및부대비, 감리비

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 2부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이시연		방재시설과장	김태중		방재시설부장	11/19 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-16218	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)