“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경 시행 및 변경계약 의뢰[북부수도사업소 수도계량기 교체공사]

우리 사업소에서 시행 중인 『북부수도사업소 수도계량기 교체공사』건에 대해 아래와 같이 설계변경(준공정산) 시행하고 계약의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 북부수도사업소 수도계량기 교체공사

2. 계약업체 : ㈜센도리*******

3. 공사기간 : 2020. 8. 4(착공일).~ 2020. 11. 21.(착수일 ~ 110일)

4. 변경내역

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증감액(원)	비 고
****	***********	***********	***********

5. 설계변경 사유 : 교체장애 발생에 따른 물량감소 및 주휴수당, 보험료 등 제경비 정산

6. 예산과목 :

- 수도계량기 교체, 수선유지교체비, 급수계량기교체비

붙임 : 설계변경 관련 서류 각 1부.  끝.

	현장민원과장
주무관	김동건		현장민원과장	11/19 代고승석
협조자
시행	현장민원과-18044	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동) 북부수도사업소 현장민원과	/
전화	02-3146-2910	/전송	02-3146-2929	/	dgeonk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)