“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(강서수도사업소 관내 수도계량기 교체공사)

우리사업소에서 시행하고 있는『강서수도사업소 관내 수도계량기 교체공사』에 대하여

설계변경 심의완료 후 설계변경을 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 강서수도사업소 관내 수도계량기 교체공사

나. 도 급 자 : ************

다. 공사기간 : ’20.7.29. ~ ’20.11.15.

라. 예산과목 : 수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(급수계량기 교체비)

마. 설계변경 사유 : 공사현장 여건에 따른 계약물량 변경

바. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공급가액	***********	***********	************
	부가가치세	**********	**********	***********
	계	***********	***********	************

(단위: 원)

붙임  1. 설계변경 심의위원회 심의결과서 1부.

2. 설계변경 내역서, 합의서 각 1부.  끝.

★주무관	서주태		현장민원과장	11/19 추경민
협조자
시행	현장민원과-17605	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2510	/전송	02-3146-2509	/		/	부분공개(5)