문서번호	시설보수과-6242
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
이승환		김준섭	11/19 변봉섭
협 조
	주무관			신동헌

상도터널 보수보강공사 실시설계용역

설계변경(정산) 보고

2020.  11.

남부도로사업소

시설보수과

상도터널 보수보강공사 실시설계용역 설계변경(정산) 보고

「상도터널 보수보강공사 실시설계용역」의 설계변경(정산) 보고 사항임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 상도터널 보수보강공사 실시설계용역

○ 용역기간 : 2020. 9. 23. ~ 11. 22.

○ 용 역 비 : ***********

○ 용 역 사 : 대신이엔지(주) 대표 하상우

□ 보고내용

○ 설계변경 사유

- 용역 계약내역 중 자문비(자문수당)에 대한 실 정산

‧ 당초) 자문위원 3명 → 변경) 자문위원 0명 (감3명)

(단위:원)

구 분		***	***	***
용역비	계	**********	**********	**********
	공급가액	**********	**********
	부 가 세	*********	*********
	자 문 비	*******	*	**********

· 예산과목 : 재해및재난예방, 재난예방및복구, 재난관리기금재난계정, 상도터널보수공사, 시설비

○ 조치계획

- 자문비 실 정산에 대한 설계변경 사항으로서 변경계약 후 실시설계용역

추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.