투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(사토장위치 및 사토수량 변경 실정보고에 대한 재검토 요청)

1.업무지시현장 : 광역소공인 특화지원센터 건립공사 주식회사 포스코에이앤씨건축사사무소, 세이브건설 주식회사

2.작 성 일 자 : 2020-11-20 11:11:27

3.지 시 내 용

1). 광역 CM-057(20.11.18)호와 관련임.

2). 위와 관련 귀 건설사업관리단에서 제출한『사토장위치 및 사토자수량 변경 실정보고』에 대한 기술검토서 내용중 일부에 대하여 재검토를 요청하오니 이른 시일내에 검토를 완료하고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

① 흙막이벽체 공사를 위한 CIP 시공중 발생하는 토사의 수량 산출이 오류라고 판단하는 근거와 계수(0.35)가 잘못 적용되었다는 구체적 근거를 제시하여 주시기 바랍니다

② 계약당시 수량산출 오류가 없는 것으로 확인후 계약이 완료된 현 시점에서  수량 산출에 대한 이의 제기에 대한 법적인 규정을 제시하여 주시기 바랍니다.

③ 사토운반거리 변경에 따른 v1, v2에 대한 속도차가 약 5km/hr로 동일하게 조사된 것은 교통체증 등 도로상황에 대한 구체적 내용을 반영한 결과라고 확인하기에는 다소 어려움이 있으니, 실제적인 내용으로 작성하여 주시기 바랍니다.

④ 사토장 변경에 관계기술자검토의견서(설계자) 내용을 검토한바, 왜? 무엇 때문에? 어떻게? 등에 대한 해답이 없는 것으로 사료되니 구체적인 사항이 반영된 검토의견서가 제출될수 있도록 바랍니다.

3. 위와 같은 사항을 감안 기 접수된 실정보고서는 추가 제출된 내용 확인후 처리코자 함을 알려 드리오니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다. 끝.

주무관							김성권			의료시설과장					차무흥					건축부장					11/20 代유현수
협조자				주무관						이준범					주무관							김재호
시행			건축부-19726									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2648						/전송			02-3708-2659					/	sssggk@seoul.go.kr												/	대시민공개