문서번호	설비부-18229
결재일자	2020. 11. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이지영	김오열	11/20 이달영

『시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사』

어르신 생활공간 바닥난방 적용 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

「시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사」

어르신 생활공간 바닥난방 적용 검토보고

「시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사」공사시행 중 수요처(어르신복지과)의 요청으로 건물 3~4층 어르신 생활공간에 바닥난방을 적용하고자 아래와 같이 검토보고 드림

*************************************************

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사

□ 위    치 : 서울시 동대문 답십리동 553외 1

□ 규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,990,95㎡

□ 공사기간 : 총차 ’19.10.25.~’21.03.24.(2차  ’19.11.03.~’21.03.24.)

□ 공사금액 : 총차 510,130,870원(2차 480,130,870원)

□ 도 급 사 : 경문이엔지주식회사

□ 감 리 사 : 주식회사 펨코엔지니어링건축사사무소

Ⅱ		추진경위

□ 수요처(어르신복지과) 난방설비 반영 요청 : 어르신복지과-9766(2020.5.25.)호

- 요양실(침실)에 바닥 난방설비가 없어 동절기에 어르신이 생활하는데 불편이 예상되므로 반영하여 주시기 바람

□ 바닥난방 설치 검토보고 : PC20(동대문 실버케어)-431(2020.11.20.)호

- 유지관리에 유리하며, 욕실에 설치가능한 초절전온수관(난방용전열관)을 관급자재로 구매, 설치하는 것이 적정하다고 판단됨

Ⅲ		검토내용

□ 바닥난방 방식 : 초절전온수관(난방용전열관)

- 기계실 공간 협소 등으로 보일러 용량 증설이 어려운 여건으로 전기를 열원으로 난방하는 방식 중 욕실 및 화장실 바닥에 설치가 가능한 방식 적용

□ 바닥난방 설치범위

- 지상3~4층 어르신 생활 공간(요양실 내 화장실, 공용욕실 포함)

[3층 평면도]

[4층 평면도]

*******************************

**************************************

******************************************************************************

Ⅳ		향휴계획

□ 2020.11월 : 구매의뢰

□ 2021.07월 : 납품완료

붙임 :  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.