코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	119특수구조단장(행정지원과장)
(경유)
제목	화생방분석차 제작 진행사항 알림

1. 재무과-12076(2020.3.5.)「낙찰자 결정 및 계약체결 안내[화생방분석차 및 조연차

제조·구매]」와 관련입니다.

2. 2020년도 소방차량 교체 및 보강 사업 관련 화생방분석차 제작에 대한 계약업체 현지확인 결과

및 진행 사항을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건    명 : 화생방분석차 제작·구매 ※ 계약기간:‘20.3.9.(월)~‘21.3.9.(화)

화생방분석차	주 요 제 원
	∘계약업체 및 샤시 : 제이인터네셔널 / MAN ∘전장X전고X전폭(m) : 10.8 X 3.5 X 2.45 ∘중량 및 출력 : 20톤 / 430마력 ∘주요장비 : 분석실(양압기능), 방사능측정장비, 기상관측장비, 휴대용복합가스측정기, 제독샤워실, 공기공급장치 등

나. 진행사항

연번	건 명	일 자	추진기관
1	계약일자	‘20. 3. 9.	서울본부, 제이인터네셔널
2	선금급 지급	`20. 4. 16.	871백만원 지급
3	차량(샤시)입고	`20. 9. 26.	MAN 샤시
4	바디제작 및 분석장비 설치	`20. 9. 30. ~ 11. 30.	HOPE 社(싱가포르)
5	제독실 설치	`20. 11. 30 ~ 12. 15.
6	분석실 전기장치 설치	`20. 12. 15 ~ `21 .1. 31
7	중간 검사	`21. 2. 1. ~ 2. 6.	HOPE 社, 제이인터네셔널
8	선적	`21. 2. 10. ~ 2. 17.	HOPE 社
9	도장 및 완성검사 등	`21. 2. 18. ~ 2. 28.	제이인터네셔널
10	납품	`21. 3. 9.	제이인터네셔널

붙임 : 화생방분석차 현지확인 결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	오창훈		안전지원과장	11/20 代정선웅
협조자
시행	안전지원과-22349	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3706-1619	/		/	대시민공개