투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	하남선(5호선연장) 입.출고선 철도종합시험운행 시행 여부 검토결과 알림

1. 한국교통안전공단 철도기술처-2997호(2020.11.12.)와 관련입니다.

2. 철도종합시험운행 시행지침 제11조(시설물검증시험 기간), 제21조(영업시운전 기간)에 의거

하남선(5호선연장) 입·출고선 철도종합시험운행 시행 여부 검토 요청에 대한 한국교통안전공단

검토 결과를 알려드립니다.

□ 검토결과

가. 공단 의견

입·출고선은 측선으로 분류되어 철도종합시험운행을 생략할 수 있으나, 차량

기지의 개량(입출고선 포함)의 경우에는 철도종합시험을 단축할 수 있는 범위에

해당되므로, 본선에 영향을 미치는 중요성을 감안하여 종합시험운행을 시행함이 타당.

- 공종별시험, 사전점검, 철도시설 기술기준 적합여부 검토, 시설물검증시험, 영업시운전 실시

나. 종합시험운행(시설물검증시험, 영업시운전) 소요기간, 시험항목 등은 향후(2021년 9월전까지)

철도시설관리자(서울시), 철도운영자(서울교통공사), 한국교통안전공단이 협의하여

결정할 예정입니다.

붙 임 공문(사본) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	도시철도토목부장,도시철도건축부장,서울교통공사사장(하남선운영준비단),하남선시스템통합감리단(책임감리원)
주무관	이재돈		차량과장	강치석		도시철도설비부장	전결 11/20 김영수
협조자
시행	도시철도설비부-10838	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7289	/전송	772-7308	/	leejdkk@seoul.go.kr	/	대시민공개