문서번호	공원시설과-4788
결재일자	2020. 11. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
현병철		최연호	11/20 代이정환
협조

- 광나루한강공원 어린이야구장 조명설치 공사 -

추가시굴조사 및 학술자문회의결과 조치계획

2020.  11.

한강사업본부

(공원시설과)

- 광나루 어린이야구장 조명설치 공사 -

추가시굴조사 및 학술자문회의결과 조치계획

「광나루 어린이야구장 조명설치 공사」추진 중 추가시굴조사 후 학술자문회의 결과 조치계획에 대한 보고임.

□ 공사개요

○ 위    치 : 광나루 한강공원 내 어린이야구장 (송파구 풍납동 49-2)

○ 규    모 : 야구장 조명탑 4본, 투광등 20개, 전선관 매립 577m

○ 공사기간 : ’20. 6.25. ~ 12.31.

○ 총공사비 : 115,966천원 (도급비 60,456, 관급비 49,867, 설계비 5,643)

○ 시공업체 : 센트로건설(주)

천호대교

□ 추가 시굴조사 결과

○ 추가 시굴조사범위 내에 대하여 유구흔적 및 문화층 미발견

□ 학술자문회의 결과

○ 회 의 명 : 광나루 어린이야구장 내 조명설치 부지 내 시굴조사

○ 일    시 : 2020.11.11.(수) 11:00~11:30

○ 장    소 : 광나루 어린이야구장 조명설치 부지 조사 현장

○ 내    용

- 추가시굴조사 현황 보고

- 조사내용에 대한 학술 자문

- 풍납토성 한강변 사적지 현상변경 행위 검토 및 보존 방안 자문

○ 자문위원 : **************

○ 자문결과

- 조사지역내에 3개의 시굴 트랜스를 넣은 결과, 해발 5.9m~8.9m 사이에서 현대 쓰레기가 혼입된 층위가 확인되어 유구가 존재하지 않음이 확인 됨

- 조사내용에 대한 기록을 남기고 계획대로 공사 재시행

□ 조치계획

○ 시굴조사 비용 처리

- 인부및장비대 : 5,907천원

- 조사재료비 : 1,106천원

- 비용처리 : 인부 및 장비대(설계변경시 반영), 조사재료비(지급처리)

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 직영 체육시설 유지관리, 시설비및부대비, 시설비

□ 향후계획

○ ’20.11.23. ~ ’20.12.31. : 공사 재시행

붙임 1. 광나루 어린이야구장 조명설치 부지 내 유적 시굴조사 결과 송부 1부.

2. 시굴조사 조사단 의견서(한성백제박물관) 1부.

3. 광나루 어린이야구장 조명설치 부지내 유적 자문의견서 1부.

4. 조사비용 산출내역서 1부.  끝.