문서번호	토목과-14548
결재일자	2020.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	부구청장 방침 제360호

주무관		도로조명팀장		토목과장		안전건설교통국장		부구청장
길선호		임정규		오석관		손경철		11/20 한영희
협조

★ ◉

연무장길 야간경관조명 개선사업 발주계획

2020. 11.

( 토 목 과 )

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√] ( 서울시 보행정책과 ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

연무장길 야간경관조명 개선사업 발주계획

연무장길 일대 보행친화형 도로공간 조성 공사와 연계하여 야간경관조명을 설치함으로써 연무장길만의 상징적인 거리조성과 쾌적한 야간 통행환경을 조성코자 함.

1		개요

○ 위    치: 연무장길 일대(성수일로 42~연무장길 57), 연무장 7길

○ 규    모: 보행로 디자인열주 28주, 교차로 디자인열주 10주,

게이트 디자인 열주 4주, 조명제어장치 1식

○ 기    간: 2020. 11. ~ 2021. 5.

○ 소요예산: 865,116,600원

- 관급비 618,849,660원, 도급비 245,540,940원, 이전비 726,000원

2		추진현황

○ 2020. 5. ~ 11.  연무장길 및 성수동 일대 조명시설 개선공사 설계용역

○ 2020. 8. ~ 11.  연무장길 야관경관조명 디자인 개발 용역

○ 2020. 10.       서울시 좋은빛위원회 심의 완료

3		세부계획

○ 배경 및 목적

- 연무장길 일대에 도로공간을 개선하는 사업과 연계하여 대상지의 조도를 개선하고 연무장길만의 특화된 경관조명을 계획하고자 함

○ 기본 방향

- 구두 산업의 중심지인 성수동 수제화거리의 아이덴티티와 복합예술거리의 특징을 담은 연무장길만의 상징적인 거리조성

야간보행환경 개선	골목상권 활성화
보안조명을 통한 야간의 우범지대를 개선하고, 안전한 도시이미지를 전달하여 연무장길의 이미지 향상에 기여	야간환경 개선을 통하여 시민들의 방문을 유도해 골목상권 활성화에 기여하여 경제적 가치를 창출

○ 조명기구 및 제어장치

품 명	보안등 규격	연출조명 규격	수량	비고
보행로 디자인 열주	LED 50W	LED 16W(RGBW)	28개
교차로 디자인 열주	LED 50W	LED 30W(고보조명)	10개
게이트 디자인 열주(A-TYPE)	LED 50W	LED 16W(RGBW)	3개
게이트 디자인 열주(A-TYPE)	LED 50W	LED 16W(RGBW)	1개
조명제어장치			1식	연출 및 프로그래밍 포함

○ 연출(안)

연출이미지

4		발주계획

○ 도급공사

- 도 급 비: 245,540,940원

- 입찰방법: 제한 경쟁 입찰(서울시)

ㆍ입찰참가자격:「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격을 갖춘 업체로서, 전기공사업법 제4조 및 동법 시행령 제6조에 의한 전기공사업 등록업체

- 공사기한: 착공일로부터 2021. 4. 30.까지

○ 관급발주

- 관 급 비: 618,849,660원

- 발주방법: (총액)규격가격동시입찰(조달청 의뢰)

- 입찰대상: 디자인(보행로, 교차로, 게이트)열주, 조명제어장치, 분전반

- 납품기한: 계약일로부터 60일

○ 예산과목

- 토목과, 지방도건설 및 확대포장, 도로관리사업, 보행환경개선지구 조성, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

5		향후계획

○ 2020. 11. 관급자재 제작 구매 발주(조달청 의뢰)

○ 2020. 11. 공사 계약 심사 및 발주

○ 2020. 12. ~ 5. 공사 시행 및 준공

붙임  1. 설계도서 1부.

2. 연무장길 일대 보행친화형 도로공간 조성 시행 계획(구청장방침-334호) 1부.