문서번호	시설보수과-7673
결재일자	2020. 11. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		류태용	11/20 박문희
협조

현장실정보고에 따른 검토 보고

(서울교 이상거동 보강공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

서울교 이상거동 보강공사

현장실정보고에 따른 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 『서울교 이상거동 보강공사』와 관련 교량인상 및 수평이동 시공방안 조정 등 현장실정보고 사항에 대한 검토 보고임

※ 시설공단 공사감독1처-7774(‘20.11.16.) : 공사 실정보고(2차)

Ⅰ		현황 및 근거

○ 공 사 명 : 서울교 이상거동 보강공사

○ 공사기간 : 2020. 7. 3 ~ 2020. 12. 22

○ 도 급 비 : 849,169,500원

○ 도 급 자 : 지레건설(주) 대표 류 형

○ 감 독 자 : 서울시설공단 공사감독1처

○ 계약현황 : 총공사비 849,170천원

	< 예산현황 >
▷예산배정: 970,882천원(도급비 970,882, 관급비 0, 이전비 0) ▷계약금액: 849,169천원(도급비 849,169, 관급비 0, 이전비 0) ※ 낙찰차액 : 131,713천원

Ⅱ		보고내용(서울시설관리공단)

❏ 교량 인상 및 수평이동 현황

○ 당초 교량인상 후 6단계로 나누어 단계별 수평이동(10~22㎜) 계획되어 있음

○ 1차, 2차구간 수평이동 결과 계획(20~22㎜)대비 이동량(2~11㎜)이 미미함

위 치		A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	A2
여의도 방향	설계	-	12mm	18mm	20mm	22mm	21mm	19mm	10mm	-
	이동	-	-	6mm	11mm	10mm	7mm	8mm	-
영등포 방향	설계	-	12mm	18mm	20mm	22mm	21mm	19mm	10mm	-
	이동	-	-	2mm	2mm	3mm	2mm	2mm	-

❏ 추진경위

○ 2020.10.13. : 1구간(P3~P5 여의도방향) 교량인상 및 수평이동

○ 2020.10.21. ~ 27 : 설계사 의견조회 및 합동회의

○ 2020.10.28. ~ 30 : 2구간(P3~P5 영등포방향) 교량인상 및 수평이동

○ 2020.11.03. ~ 05 : 설계사 의견조회 및 회신

❏ 설계사 의견조회 결과

○ 1차, 2차구간 수평이동결과 Beam의 횡방향 강성이 매우 크고, 인상하지 않은 구간(A1~P2,P6~A2)에서 상부거더를 구속하고 있어 수평변위가 발생되지 않은 것으로 추정됨에따라 방향별 전구간을 동시인상하여 상부거더의 횡방향 구속을 제거 후 수평이동하고 중앙분리대를 기점으로 내측으로 거동하고 있는 교대부(A1,A2)는 캔틸레버 방향으로 수평이동시켜 유간거리 확보

당 초

▼

변 경

❏ 공단 검토의견

○ 수평이동시 발생하는 유압용량과 앵커볼트 인발하중 등을 고려하여 추가적인 힘을 가하는 것은 곤란하므로 설계사에서 제시한 상부거더의 횡방향 구속을 제거하고 전구간 인상 후 수평이동 시키는 변경계획(안)은 적정한 것으로 판단됨

○ 설계사에서 제시된 방안에 따라 현재 작업 진행중인 영등포방향 전구간에 대하여 동시인상 및 수평이동을 우선 시행토록 하고 수평이동 결과를 확인한 후 여의도방향에 대한 인상방법을 재검토하고자 함

❏ 개략공사비 : 증)28,870천원

Ⅲ		조치의견

○ 진행되고 있는 이상거동으로 인하여 P4구간(전망대 횡벽부)의 접합 및 파손이 있어 교량인상 후 수평이동시켜 유간거리를 확보하고 더 이상 횡방향 변위가 진행되지 않도록 고정하고자 하는 공사임

○ 서울시설관리공단 검토보고 사항에 대하여 승인 시행토록 하고 추후 설계변경시 본 공사의 낙찰차액을 활용 반영 조치코자 함

붙임  공단 보고내용 1부.  끝.