투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(길동생태공원 무장애 친화공원 화장실 개선공사)

「길동생태공원 무장애 친화공원 화장실 개선공사」과 관련하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 길동생태공원 무장애 친화공원 화장실 개선공사

나. 공사기간 : 2020.10.29. ~ 2020.11.27.

다. *******************************

라. *********************

마. 준공기한 연기

*******************************

*******************************

바. 연기사유 : 전문가 자문 결과에 따른 일부 공정 변경

사. 지체상금 : 미부과

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 검토보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	노해민		시설관리팀장	조민형		시설과장	11/23 代하종식
협조자
시행	시설과-3740	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길33 시설과	/
전화	02-2181-1162	/전송	02-2181-1169	/		/	부분공개(5)