문서번호	토목부-22611
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		최진우	11/23 代진재섭
협조

지능형교통관리시스템 이설 검토 보고

[세종대로 도로공간 재편사업(2구역)]

2020. 11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

지능형교통관리시스템 이설 검토 보고

[세종대로 도로공간 재편사업(2구역)]

세종대로 숭례문 중앙버스승강장 이전과 도로 포장시 저촉되는 지능형교통관리시스템(ITS, 교통량 측정용 차량검지기)의 이설이 필요하여 검토 보고 드림.

********************************

Ⅰ		관 련 근 거

○ 서울시설관리공단 교통정보처-6404(´20.09.04.) : 지장물 이설 검토

○ 세종수 제2020-115호(´20.11.13.) : 지능형교통관리시스템 이설 검토

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 세종대로 도로공간 재편사업(2구역)

○ 위    치 : 서울역 교차로~시청 교차로

○ 규    모 : 차로축소, 보행공간 및 자전거도로 조성

○ 공사기간 : 2020. 07. 16. ~ 2020. 12. 31.

○ 도 급 비 : 6,154백만원

○ 시 공 사 : 키움건설(주)외 2개사

○ 감 리 사 : 수성엔지니어링외 1개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 세종대로 숭례문 중앙버스정류장 이전 및 도로 재포장으로 서울시설공단에서 관리하는 지능형교통관리시스템(ITS, 교통량 측정용 차량검지기)에 대한 원인자 부담으로 이설이 필요한 실정임.

○ 이설공사 현황

주요 이설 내용	규 격		단 위	수 량	비고
전력케이블 철거	F-CV14㎟/2C		M	110
전력케이블 설치	F-CV16㎟/2C		M	110
지자기검지기 종합시험			개	1
지자기센서루프HEAD 설치(야간)			개	20
국산 지자기센서 설치(야간)	자재 포함		개	20

○ 공사비 현황

(금액단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
*************	*	**********
*****	*	**********
*****	*	*********
*******	*	**********
*****	*	*********
*****	*	**********

※ 신규공종 강제협의율 적용((87.697%+100%)/2=93.848%)

Ⅳ		조 치 의 견

○ 숭례문 중앙버스정류장 이전 및 도로 아스팔트 평삭후 재포장시 지능형교통관리시스템 철거후 설치가 필요한바, 상기와 같이 공사를 시행하도록 조치하고, 추후 설계변경자문위원회 자문 결과를 반영하여 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  1. 서울시설공단 공문 1부.

2. 건설사업관리단 검토 공문 1부.  끝.