문서번호	설비부-18264
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
나경운	여인웅	11/23 이달영

『탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비 공사(장기 2차)』

공기연장 검토  보고

2020. 11.

『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기2차)』

공기연장 검토  보고

「탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비공사」선행 공정 토목공사 지연에 따른 기계설비공사 공사기간 연장 요청이 있어 2차 공사 준공기한을 연기하고자 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

위    치 : 서울시 강남구 개포로 625(탄천물재생센터 내)

공사기간 : 2017. 12. 4. ~ 2020.12. 31.(2차 ’19. 12. 12 ~ ’20.  12. 31.)

규  모 : 총인처리시설 2개소 처리량 Q=450,000㎥/일

○ 1·2처리장 총인유입 및 처리설비, 농축설비, 용수공급설비, 탈취설비, 반류수이송설비 각 1식

공 사 비 : 11,715백만원(도급비 1,837백만원 / 관급비 9,878백만원)

시 공 사 : ㈜이수에이치앤씨/(주)임하엔지니어링/금수티아이(주)

감리용역 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소 외 3개사

Ⅱ		관 련 근 거

기계설비공사 계약기간 연장 요청 검토 의견서 제출

- 탄천하감 2020-352호(2020. 11. 18.)

건설공사 사업관리 방식 검토기준 및 업무수행지침 제94조 16항

Ⅲ		검토내용

총차 및 2차 준공기한 연기

○ 수질유예 승인 지연 등으로 1·2처리장 여과수조 토목구조물 개량공사가 지연되어 토목공사 준공일이 당초 2020. 11. 14.에서 2021. 3. 31.로 연장되었고, 그에 따라 종합시운전 착수 일정도 연기되었음.

○ 선행 공정인 토목공사 지연에 따른 기계설비공사의 미비한 사항과 종합시운전 기간 동안 기계장비와 기계배관에 대하여 부하 성능 운전을 통해 발생 되는 문제점 등을 보완 할 수 있는 기간이 부족 함.

※ 토목공사 기간: ’17. 9. 1. ~ ’20. 11. 14. → ’17. 9. 1. ~ ’21. 3. 31.(연장)

○ 변경내용

구 분			당 초	변 경	비고
준공기한	총차	기간	2020. 2. 3.	2021. 3. 31.	증)90일
		금액	1,837,280,000	변경 없음
	1차	기간	2019.12.31	2020. 3. 31	증)90일
		금액	1,473,562,190	변경 없음

공사기한 연장사유 : 선행 공정인 토목공사 지연

귀책소재 : 도시기반시설본부

지체상금 부과여부 : 미부과

건설사업관리기술자 의견

○ 선행 공정 토목공사 일정 증가에 따라 기계설비공사 계약기간을 토목공정 일정에 맞게 변경하여 토목 공사 지연에 따른 미비한 기계설비공사 및 종합시운전 중 발생할 수 있는 문제점 등을 보완할 수 있도록 2021. 3. 31.까지 계약기간을 연장하여 최종 준공함이 타당하다고 판단 됨.

Ⅳ		조 치 계 획

건설사업관리단 보고사항을 검토한 결과 기계설비공사 연장에 대하여 타당한 것으로 판단되어 이를 총무부에 변경 계약 의뢰 하고자 함.

붙임  1. 검토의견서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.