실정보고 검토서

공사명

개봉고가 성능개선공사

공사개요

· 위    치: 구로구 개봉로 68~개봉로 124

· 규    모: 폭 18.9m, 연장 332m

· 공사기간: ’19. 8. 12.~’23. 4. 11.

· 도 급 비: 12,697백만 원

· 시공사: 홍익산업개발(주) 외 1

· 감리단: ㈜유신 외 2

· 설계사: ㈜경동엔지니어링 외 2

실정보고 건명

개봉고가 아스콘 포장 정비

실정보고

사유

개봉고가 상행선(개봉사거리 방면) 구간의 포장 노후화로 다수의 포트홀이 발생하여 안전사고 예방을 위해 강서도로사업소의 아스콘 재포장 요청사항을 반영함

건설사업관리단

검토의견

강서도로사업소의 개봉고가 아스콘 재포장 요청에 대한 공사비 반영은 적정함

공기에 미치는 영향

(  -  )  개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	-	아스콘포장 1.97a 차선도색 87m	증) 1.97a 증) 87m
도급금액	-	22,506,000	증) 22,506,000

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

- “해당 없음”

발주처

검토의견

개봉고가 상행선(개봉사거리 방면) 구간의 포장 노후화로 인해 다수의 포트홀이 발생하여 안전사고 예방을 위해 포장정비는 적정함

비 고

결재

담당

김구

과장

代이상욱A

부장

11/24

김용제