문서번호	조경과-15064
결재일자	2020. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경협력팀장	조경과장
안혜연	김상주	11/24 문길동

-2020년 동네숲(골목길) 가꾸기 사업-

사업계획 변경 요청에 따른 검토보고(관악구)

2020.11.

푸른도시국

(조 경 과)

-2020년 동네숲(골목길) 가꾸기 사업-

사업계획 변경 요청에 따른 검토보고(관악구)

2020년 동네숲(골목길) 가꾸기 사업 관련 보조사업자의 예산 집행계획 변경에 대해 자치구로부터 변경 승인 요청이 있어 검토 보고드림.

▢ 사업개요

○ 사 업 명 : 함께 가꾸는 꽃피는 정원

○ 보조사업자  : 관악산과도림천환경지킴이

○ 협약 자치구 : 관악구 공원녹지과

○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 11.

○ 대 상 지 : 호암로498 신우초등 앞 외 7개소

○ 사업내용 : 플랜트박스 정원 조성, 도시녹화 교육 및 정원답사

○ 사 업 비 : 100,000천원

▢ 변경사항

○ 자치단체경상보조금 비목간 집행계획 변경(인건비, 사업진행비 → 활동비)

○ 변경사유

- 코로나19로 인한 현장답사, 간담회 축소로 인건비·사업진행비 감액 및 플랜트박스, 화훼구입 등 활동비 증액

○ 세부 변경 내역

비 목		세부항목	보 조 금(천원)			변경사유
			변경 전	변경 후	증 감
계			30,000	29,826	감174
자치단체 경상보조금	인건비	강사료, 보조강사료	9,820	9,616	감204	강사료 감124 보조강사료 감 30
	사업진행비	교통비, 식비, 임차비	18,100	9,260	감8,840	교통비 감4,340 식비 감2,500 임차비 감2,000
	활동비	간담회비, 재료비	2,080	10,950	증8,870	간담회비 감1,080 재료비 증9,950

○ 자치구 검토결과

- 원활한 사업 추진을 위해 금액 조정이 필요한 사항으로 보임.

▢ 검토결과

○ 코로나19 영향으로 인해 인건비와 사업진행비를 감액하고, 수요가 많았던 플랜트박스와 화훼 등 활동비를 증액하는 사항으로, 원활한 사업진행을 위해 비목간 집행계획 변경 승인함.

▢ 향후계획

○ 검토결과 및 변경승인 통보(시→관악구)

붙임  자치구 공문 1부.  끝.