“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행[2020년 아리수 직결음수대 설치공사(시흥초등학교 외 21개소)]

우리사업소에서 시행중인『2020년 아리수 직결음수대 설치공사(시흥초등학교 외 21개소』에 대하여 설계변경 심의위원회 심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2020년 아리수 직결음수대 설치공사(시흥초등학교 외 21개소)

나. 공사개요 : 당초 D=15~20mm, L=605m

변경 D=15~20mm, L=407m

다. 공사기간 : 2020.6.11. ~ 2020.12.19.

라. 계 약 자 : ㈜창인엔지니어링 (대표 : 윤기만)

마. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
도 급 비	49,572,000	42,186,800	증) -7,385,200
공급가액	45,065,454	38,351,637	증) -6,713,817
부 가 세	4,506,545	3,835,163	증) -671,382

바. 설계변경 사유 : 공종별 계약물량 증․감에 따른 변경

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비), 음수대설치

붙임 : 1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경 사전심의의결서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 검증확인서 1부.

5. 설계변경 합의서 1부.

6. 보험료 완납증명원 1부.  끝.

주무관	김태승		★급수관리팀장	이일로		급수운영과장	代이일로		남부수도사업소장	11/25 박병성
협조자	주무관	황인성		주무관	김동욱		주무관	박창남
행정지원과장	홍기관
시행	급수운영과-19912	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4545	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(6)