문서번호	도로보수과-11815
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
이상하		강종훈	11/25 김영철
협조

2020년 지반침하예방사업(서부)

공동탐사 결과 및 설계변경 시행계획 보고

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

2020.11.24.

서부도로사업소

[도로보수과]

공동탐사 결과 및 설계변경 시행계획

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 지반침하예방사업-서부

○ 공사기간 : 2020. 3.26 ~ 2020.12.31

○ 시 공 사 : ***************

○ 복구물량 : 원인조사 및 복구 19개소

○ 총사업비 : 114백만원

*****************************************************************

□ 관련문서

○ 공동조사 복구통보(시 → 사업소) : 66개소

- 도로관리과-11693(2020. 7.23), -14624(2020. 9.21), -15680(2020.10.14)

○ 소요예산 요청(사업소 → 시)

- 도로보수과-8146(2020. 8.20), -9708(2020. 9.25), -10568(2020.10.21)

○ 예산 재배정 통보(시 → 사업소)

- 도로관리과-13589(2020. 8.31) :  60백만원

-  도로관리과-16224(2020.10.23) : 250백만원

○ 예산 재배정에 따른 시행계획 보고

- 도로보수과-10709(2020.10.26.) : 1차 및 2차 예산재배정금액  310백만원

□ 보고내용

○ 상기 호와 관련하여 시 동공탐사 용역(3-1구역) 및 사업소 자체 도로함몰에 대해원인조사 및 조치결과를 보고합니다.

- 당초 19개소를 발주 및 시행코자하였으나, 市동공탐사용역관련 원인조사 및 항구복구통보에 따른 64개소, 사업소 도로함몰 자체 복구 15개소를 복구완료하고 정산처리코자 보고합니다.

- 공동조사 및 복구현황 : 79개소

공 종	복구수량 (계)	市공동탐사요청			사업소자체	비고
		계	완료	금번제외
동공복구 (개소)	79	66	64	-2 (중복, ‘21년시행)	15

※ 금번제외된 1개소는 통일로 친환경포장구간으로 금년조사는 곤란하여 ‘2021년에 시행

- 공동조사(시 64 +사업소자체 15) 원인별 분석현황

구 분	복구수량 (계)	장기침하 (매설물주변 다짐불량)	기층불량 (굵은돌, 폐기물 등 되메움재불량)	하수 (하수시서 접합부 손상등)	기타 (공동원인 미발견)	비고
원인별 (개소)	79	47	25	6	1

□ 조치계획

○ 상기 내용과 같이 사업추진중인  『2020년 지반침하예방사업(서부)』반영하여 설계변경(정산)시행코자하며,

○ 부족한 도급액(260백만원) 및 관급비(17백만원)는 1,2차 예산재배정금액(310백만원중 277백만원)을 사용하여 설계변경 시행

- 설계변경금액

구분	설계변경금액(원)		증감	비고
	당초	변경
계	***********	***********	**************	1,2차예산
도급비	***********	***********	**************
관급비	***********	***********	**************
이설비	***********	***********	*

- 설계변경수량

구분	설계변경수량(개소)		증・감	비고
	당초	변경
계	19	79	증, 60

○ 설계변경에 따른 예산 확보

(단위 : 백만원)

구 분	설계변경 증액사용	예산재배정 총금액			비고
		계	최초	1,2차
총재배정액	***	***	***	***

□ 향후계획

○ 2020.11.30. : 시동공조사 결과보고(사업소 → 市도로관리과)

○ 2020.12.05. : 설계변경계약

○ 2020.12.09. : 공사준공

붙임 : 1. 市공동관리대장(사업소 자체 도로함몰 포함) 총괄1부.

2. (개략)설계변경내역서1부.

3. 계약금액조정검증확인서(지방침하예방사업)1부.

4. 예산재배정에 따른 시행계획보고서1부.

5. 참고(복구통보, 예산요청, 예산재배정)각 사본1부.  끝.