문서번호	녹지관리과-4086
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리팀장	녹지관리과장
이지혜	김한섭	11/25 권종화

- 2020년 재해 위험수목 제거 및 정비사업(연간단가) - 공사실정사항 검토보고

2020. 11.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

- 2020년 재해 위험수목 제거 및 정비사업(연간단가) -

공사실정사항 검토보고

『2020년 재해 위험수목 제거 및 정비사업』시행중 추가 정비 물량이

발생(민원)하여 검토한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1		사업개요

□ 사 업 명: 2020년 재해 위험수목 제거 및 정비사업(연간단가)

□ 위    치: 남산공원 및 산하공원 등

□ 사업내용: ****************************

□ 사업기간: 2020. 2. 6. ~ 12. 20.

□ 도 급 비: *****************************

□ 도 급 자: ****************************

2		보고내용

□ 정비물량 (실적 및 추가물량)

구 분	정비 수량		정비사유
	위험수목제거 (B20~65)	수형조절 등 (B11~70)
총 계	****	****
******* ************	***	***	*********************
******* *************	***	***	*****************************
******* *************	****	***	**************************************
******* *************	****	****	**********************************************
******* *********	***	****	********************* **********************

3		문제점 및 대책

□ 추가 물량 사업 반영시 예산 부족

공 종	단위	수 량			금액증감 (단위: 원)
		당초	변경	증감
순공사비
1) 위험수목 제거 (B20~65)	주	***	***	****	************
2) 수형조절(일반전정) (B11~70)	주	**	***	****	*************
소 계					************
2. 제경비					**********
합 계					*************

□ 본 사업의 낙찰차액중 일부 활용하여 사업시행

(단위:원)

예산액	발주액	계약금액	낙찰차액	비고
***********	***********	***********	**********

□ 변경공사비

구 분		공 사 금 액 (단위: 원)			비고
		당 초	변 경	증 감
도급비	공급가액	***********	***********	**********
	부가가치세	**********	**********	*********
	계	***********	***********	**********

4		보고자의견

□ 안전을 요하는 긴급 민원임을 감안하여 선 시공, 후 설계변경하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 위험수목 조사 및 작업지시서(1차~5차) 1부.  끝.