문서번호	전산정보과-12274
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
김지영		代김지영	11/25 장화영
협조
	주무관		박영미

「디지털 서울 워터 플랫폼 구축 사업」

월간 보고서(10월)

2020. 11.

「디지털 서울 워터 플랫폼 구축 사업」

월간 보고서(10월)

□ 사 업 명 : 디지털 서울 워터 플랫폼 구축

□ 사업기간 : 2020년 9월 ~ 12월(4개월)

□ 사 업 비 : *********

□ 계약방법 : 수의계약(공고 유찰에 따라 단독 응찰한 업체에 대해 제안서평가위원회에서 적격심사 후 수의계약 체결)

□ 사업내용

• 상수도 데이터를 통합, 실시간, 시각화 하는 시스템 개발

• 플랫폼 구축 : 가상화서버, DID 디스플레이, SW 등 납품・설치

Ⅰ		10월중 추진 현황

□ 자료조사 및 수집

○ 부서별/분야별 담당자 인터뷰 실시 : 10. 7 ~ 10. 26.

○ 시스템 연계 대상 정리(홈페이지, 수운영, 예산회계, 아리수인포 , 상수도GIS, 수질관리)

○ 서울시 행정포털, 업무관리시스템 연계 협의-조직정보(제공불가)

○ 한국수자원공사 팔당2취수장 연계정보 수집

○ 문자발송 시스템 연계 관련 정보 요청

○ 서울시 디지털시민시장실 연계 요청

□ 인프라 구축

○ 클라우드센터에 서버입고 및 설치, S/W입주(진행중) : 10. 30. ~

○ 가상화 서버 OS 라이센스 발급 신청

○ 본부장실 디스플레이 설치(완료) : 10. 30.(금) ~ 10.31.(토)

□ 시스템 개발

○ 클라우드센터 개발・운영서버 설정

○ 서울시 디지털시민시장실 재난정보 적재

○ 네이버 뉴스, 지도, SNS연계 분석 및 테스트

○ 화면 UI/UX설계 : 관리지표, 조직도, 주요사업

○ 실시간 정보 분야 UI 설계

○ 조직도/직원정보 DB분석 및 기능 개발

○ 화상회의용 RemoteMeeting API 적용테스트

Ⅱ		10월중 투입인력 현황

구분	성명	투입공수(M/M)		비고
		금월	누적
ＰＭ	***	1	2	프로젝트 총괄 진행, 상주
자료분석	***	0.5	1
자료수집/적재	***	0.6	1.2	추가투입, 상주
기획/디자인	***	0.5	1
개발	***	1	2
	***	-	-
	***	0.5	1
	***	-	-
	***	1	1.3	추가투입, 상주
	***	-	-	추가투입, 안정화
합계		5.1	9.5

Ⅲ		사업추진 진행현황

[단위 : 진행율(%)]

구 분	계 획	실 적	계획대비 진도율	비고
사업관리	*****	*****	*****
자료조사・수집	****	****	****
개발	*****	*****	***
전 체	****	****	****

Ⅳ		11월 추진계획

□ 자료조사 및 수집

○ 부서별/분야별 담당자 인터뷰 실시

○ 16개 내부시스템 연계대상 선정

○ 서울시 디지털시민시장실 연계요청

□ 인프라 구축

○ 클라우드센터에 서버 설치 및 테스트

○ 본부장실 플랫폼 설치 기능테스트

□ 시스템 개발

○ 화면 UI/UX설계 : 관리지표, 조직도, 주요사업

○ 화면 프레임 개발 : 관리지표, 웰컴보드, 주요사업, 재정현황, 여론동향 등

○ 화상회의용 RemoteMeeting 테스트

○ 스토리보드 개발

○ API 파서 공통 기능 개발

붙임  1. 주간업무 추진현황 보고서 4부.

2. 월간업무 추진현황 보고서(10월) 1부.

3. 부서인터뷰결과 1부.   끝.