투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차) 설계변경 의뢰

1. 기전과6829-(2020. 11. 25.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소(기전과)에서 시행 중인 『2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)』와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(2차)

나. 공사위치 : 영등포구 대림3동사거리 외 6개소

다. 공사내용 : 교통사고 잦은 지점 교통 시설물 개선

라. 계약금액 : *******************************

마. 계약업체 : ************

바. 계약기간 : 2020. 7. 1. ~ 2020. 11. 30.

사. 설계변경 내역

1) 설계변경금액

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증·감 액
도급비	공 급 가 액	***********	***********	************
	부가가치세	**********	**********	***********
	계	***********	***********	************

2) 설계변경사유 : 어린이보호구역 관련 규제 사항 추가, 노후 교통신호등 교체, 음향신호기 및 잔여시간표시기 추가 설치에 따른 물량 조정

아. 예산과목 : 교통사고 잦은 곳 개선, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 교통사고 잦은 곳 개선, 시설비

붙임  1. 설계변경내역서 1부.
2. 합의각서 1부.
3. 원가검증확인서 1부.
4. 설계변경 방침서 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
★주무관	이중현		기전과장	석대창		남부도로사업소장	11/25 변봉섭
협조자	주무관	이태근
시행	기전과-6835	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145 (대림동)	/
전화	02-3284-5458	/전송	02-832-5470	/	ljh21491@seoul.go.kr	/	부분공개(6)