	119특수구조단
수신	소방청장(항공통신과장)
(경유)
제목	서울소방 헬기 통합지휘망 수리·개조 일정 변경 요청

1. 항공통신과-5066(2020.09.14) ‘헬기 통합지휘 시스템 수리개조 일정`과 관련입니다.

2. 위호와 관련 통합지휘망 수리·개조 일정에 대해 다음과 같이 변경요청합니다.

가. 대상기종 : AS365-N2(서울001호, 002호), AW189(서울003호)

나. 변경전 장착일정

- 1호기: 20.11.30~12.14 / 2호기: 20.12.22~21.1.4 / 3호기: 21.1월 중

다. 변경사유 : 3호기(AW189) 외주정비 중 결함발생에 따라 출고 지연

※  서울소방항공대 상시 2대 긴급임무 출동태세를 유지하고 있음.

라. 향후계획 : 3호기(AW189) 외주정비 완료 후 수리·개조 일정 협의 예정.  끝.

	119특수구조단장
★담당자	박영춘		담당자	유용산		3팀장	김정식		소방항공대장	11/25 황영호
협조자
시행	소방항공대-3501	(		)	접수		(		)
우	07505	서울특별시 강서구 하늘길 84(김포국제공항 경항공기 지역) 서울 소방항공대	/
전화	02-3706-1935	/전송	02-3706-1939	/	pyc4771@seoul.go.kr	/	부분공개(7)