문서번호	급수운영과-27093
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	동부수도사업소장
박종대	권기섭	유동수	11/25 이재호
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

마장역 주변외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고(제1회, 최종)

2020. 11.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

마장역 주변외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고(제1회, 최종)

우리사업소에서 시행하고 있는 「마장역 주변외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사」의 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고드림.

공사현황

○ 공 사 명: 마장역 주변외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 도 급 자: **************

○ 도급금액: ************

○ 공사기간: 2020. 4. 3 ~2020. 11. 28.

○ 공사개요: ****************************

설계변경 내용

○ 설계변경 사유

- 토공, 부설공, 구조물공 등 시공물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 변경

- 산재·고용보험료등 제경비 변경 등

○ 설계변경 세부내역

- 변경 공사개요

구 분	단위	물량내역		증·감	비 고
		당 초	변 경
****** ************	*	*****	*****	****

○ 세부내용 및 금액 증·감 현황(붙임 설계변경 내역서 참조)

구 분	공종	명칭	증·감	비고
*****	**	**************************	**************
*****	***	***************	**************
*****	***	********************	**************
**	**	*********	**************

- 세부공종별 주요 변경내용

연번	공 종	주요 변경내용	공사비(증·감)	비고
1	******	***************** *********************	**********
2	***** ****	******************* ****************	**********
3	***	****************** **************************************	**********
4	****	******************	*********

공사비 변경내역

(단위: 원)

*****		*****	*****	***********
***	*******	***********	***********	************
	*****	**********	**********	************
	*	***********	***********	************

심의위원회 개최현황 및 결과

○ 개최일자: 2020. 11. 25.(수)

○ 개최장소: 금수운영과 사무실(3층)

○ 참석위원: ***********

○ 검토내용: 물량 증·감 등의 적성성 및 신규공종의 단가산출 검토

○ 검토결과: 변경내역에 대하여 적정의견 제시

향후 계획

○ 설계변경 심의위원회 개최결과 변경내역에 대해 적정하다는 의견이 제시됨에 따라 제시된 내역으로 설계변경을 시행하고 행정지원과로 변경계약을 의뢰코자 함.

붙임  1. 설계변경 심의 의결서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.