문서번호	토목부-22541
결재일자	2020. 11. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		장수철	11/20 김용제
협조

설계변경(전체2회, 2차1회) 검토 보고

【개봉고가 성능개선공사 외 1개소 건설사업관리용역】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

도시기반시설본부

토 목 부

설계변경(전체2회, 2차1회) 검토 보고

【개봉고가 성능개선공사 외 1개소 건설사업관리용역】

개봉고가 성능개선공사 외 1개 공사의 건설사업관리용역에 대한 물가변동, 건설사업관리기술인 투입계획 변경을 반영하여 설계변경하고자 보고 드림

1		용역개요

❍ 용 역 명 : 개봉고가 성능개선공사 외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역

❍ 용역규모 : 개봉고가 성능개선공사(폭 18.9m, 연장 332m)	개봉철도고가 성능개선공사(폭 22.1m, 연장 149m)

❍ 용역기간 : 2019. 6. 17.~2023. 7. 16.

❍ 용 역 비 : 4,515백만 원(2차: 1,341백만 원)

❍ 용 역 사 : ㈜유신 외 2

2		추진경위

❍ ’19. 6. 13.	: 건설사업관리용역 계약

❍ ’19. 6. 17.	: 건설사업관리용역 착수

❍ ’19. 12. 9.	: 용역 변경(1회) 계약

❍ ’20. 2. 16.	: 용역(1차) 준공

❍ ’20. 2. 17.	: 용역(2차) 착수

❍ ’20. 2. 18.	: 물가변동 반영

❍ ’20. 4. 1.	: 건설사업관리기술인(공사, 안전분야) 투입

❍ ’20. 5. 4.	: 건설사업관리기술인(강교분야) 투입

❍ ’20. 9. 14.	: 용역(2차) 기성

3		설계변경 내용

❍ 용역비 및 용역기간

(단위: 천원)

구 분		용 역 비	증･감	용 역 기 간	비고
전 체	당초	4,515,390		2019. 6. 17. ~2023. 7. 16.
	변경	4,710,090	194,700	2019. 6. 17. ~2023. 7. 16.	준공기한 변경없음
2차 (1회)	당초	1,341,000		2020. 2. 17. ~2020. 12. 31.
	변경	1,368,700	27,700	2020. 2. 17. ~2020. 12. 31.	준공기한 변경없음

❍ 건설사업관리기술인 배치 현황

구 분	단위	전 체			2차(1회)
		당초	변경	증･감	당초	변경	증･감
토목	인·월	214.76	214.76	-	59.8	59.8	-
안전	인·월	54.84	54.84	-	16.58	16.58	-
강교	인·월	10.22	10.22	-	5.11	6.82	1.71
전기	인·월	2.76	2.76	-	-	-	-
기술지원	인·월	47.9	47.9	-	13.8	14.1	0.3

❍ 설계변경 사유

- 물가변동 반영(4.64%, 194,700천원)

- 건설사업관리기술인(강교분야) 투입계획 변경(6개월→8개월)

4		조치계획

❍ 상기 보고 내용과 같이 건설사업관리용역 전체(2회) 및 차수(2차1회)에 대해 설계변경을 시행하여 건설사업관리 업무 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  설계변경내역서(전체2회, 2차1회) 1부.  끝.