투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
(경유)
제목	계약심사 요청(중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사-설계변경)

우리본부에서 추진중인 ‘중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사’ 관련, 설계변경을 진행하고자 아래와 같이 계약심사 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 심사금액                                                       (단위: 천원)

구분	총차	3차	비고 (증 감액)
당초	2,819,009	1,631,837	증)271,283
변경	3,090,292	1,903,120

나. 공사개요

1) 위치: 서울특별시 성동구 자동차시장3길64(송정동)

2) 기간: 2017.11.20. ~ 2020.12.30. (3차: 2020.01.16. ~ 2020.12.30.)

3) 규모: 총인처리시설 A, B동, 유입펌프, 약품투입시설, 소방 및 건축설비공사

다. 관련근거: 계약심사업무처리규칙 제3조 제5호

- 계약금액이 20억원 이상공사의 설계변경에 따른 증액분 또는 2회 이후 누적증액분이 당해 계약금액의 10% 이상인 설계변경 공사

붙임: 1) 설계변경 심사요청서     1부

2) 설계변경 도서(별도송부) 1부  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	양우창		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	11/20 이달영
협조자
시행	설비부-18199	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8605	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	부분공개(5)