문서번호	박물관과-12730
결재일자	2020. 11. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연	이병두	11/20 이성은

『삼청각 별채 리모델링 전기공사 감리용역』

용역 계약 변경 검토보고

(과업내용 추가 및 기간연장)

2020. 11.

문 화 본 부

(박물관과)

『삼청각 별채 리모델링 전기공사 감리용역』

용역 계약 변경 검토보고

(과업내용 추가 및 기간연장)

「삼청각 별채 리모델링 공사」시행 중 통신공사와 소방공사 업체가 선정됨에 따라 해당 공사에 대한 감리업무 수행을 위해 용역 계약을 변경하여 공사 현장 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		용역 개요

❍ 용 역 명 : 삼청각 별채 리모델링 전기공사 감리용역

❍ 용역기간 : ***************************

❍ 계약업체 : ************************

❍ 계약금액 : **********************

❍ 용역내용 : ******************************

Ⅱ		추진 경위

❍ 2020.10.28.  : 삼청각 별채 리모델링 공사(건축, 전기) 착공

❍ 2020.10.28.  : 삼청각 별채 리모델링 공사 감리용역(건축, 전기) 착수

❍ 2020.11.05.  : 삼청각 별채 리모델링 통신공사, 소방공사 발주공고

❍ 2020.11.17.  : 통신공사 적격심사 완료 및 낙찰자 결정

❍ 2020.11.19.  : 소방공사 적격심사 완료 및 낙찰자 결정

Ⅲ		용역 계약 변경 검토

□ 변경내용

구분	당 초	변 경	증 감
과업내용	********	*************
계약금액	************	************	***********
용역기간	********************************	********************************	*****

❍ 변경사유

- 통신공사와 소방공사 업체가 선정되어 공사 착수 예정으로 감리용역을 각각 별도 발주시 업무 혼선 및 관리의 어려움이 있음

- 안전하고 효율적인 공사현장 관리를 위하여, 기존 전기공사 감리업체에 통신‧소방공사 감리 과업을 추가하여 전기‧통신‧소방 공사에 대한 통합 감리를 추진하고자 함

***************************************************************

- 면허 및 자격 검토결과 엔지니어링산업 진흥법 및 소방시설공사업법에 따른 통신 및 소방공사 감리 유자격자로서 감리업무 수행 가능

□ 귀책사유 : 서울특별시

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		조치 의견

❍ 추정가격 2천만원 이하의 소액으로, 안전하고 효율적인 공사 현장 관리를 위하여 기존 감리용역에 과업내용 추가에 따른 용역 계약 변경이 타당한 것으로 판단되어 변경계약을 추진하고자 함

Ⅴ		향후 계획

❍ ’20. 11. 20.  : 계약변경 의뢰(박물관과→재무과)

❍ ’20.  4. 26. : 용역 준공

붙 임  1. 감리용역비 산출서(통신,소방 포함)

2. 과업내용서(통신, 소방감리 포함)

3. 면허등록증 사본(전기, 통신, 소방) 각1부.  끝.