문서번호	도시철도사업부-11356
결재일자	2020. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		동북선2과장	도시철도사업부장
김동일		김현기	11/24 이철
협조
	주무관		왕태현

『동북선 도시철도 민간투자사업건설사업관리용역(1공구)』

계약 내용 및 금액 조정을 위한 설계변경 검토 보고

(총괄 1회, 1차 1회)

2020. 11.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

『동북선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역(1공구)』

계약 내용 및 금액 조정을 위한 설계변경 검토 보고

(총괄 1회, 1차 1회)

동북선 도시철도 건설사업관리용역(1공구)의 계약내용, 물가변동 및 기술자 투입계획 변경 등에 따른 설계변경 요청에 대한 검토보고임

※ 동북선1공구 건설사업관리용역 계약변경 요청(철도감리부-20-00340호, ’20.11.20.)

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 동북선 도시철도 민간투자사업(1공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

□ 계 약 자 : ㈜동해종합기술공사외 3개사

□ 계약현황	(단위:천원, 부가세포함)

구 분	계 약 일	계 약 기 간	계약금액	비 고
총 차	2019.09.18.	2019.12.02~2025.05.01	5,249,900
1 차	2019.09.18.	2019.12.02~2020.03.01	*******
잔 여		2020.03.02.~2025.05.01	5,137,900

Ⅱ		보고 내용

□ 계약내용 변경

○ 사업시행자와 건설관리기술인간 업무내용 누락에 따른 과업내용서 보완(추가)

▶ 변경(추가) 내용

건설공사와 관련된 사항에 대해서는 건설사업관리자는 「발주청(공사관리관)의 공사시행 단계별업무」의

‘입회, 검토, 확인, 승인’에 대해 동북선 도시철도 민간투자사업 사업시행자(동북선도시철도㈜)에게

확인 등을 받아야 하며, 필요시 발주청(공사관리관)에 제출하여야 한다.

○ 물가변동 조정방법 개선을 위한 용역계약 특수조건 보완(추가)

- 물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 동북선 경전철 민간투자사업 실시

협약에 따라 소비자물가지수로 조정

· (당초) 품목조정율 → (변경) 소비자물가지수

□ 물가변동(소비자물가지수) 및 건설관리기술인 투입계획조정에 따른

계약금액 조정

○ 물가변동(소비자물가지수) 반영 : 증 1.25%

○ 건설사업관리기술인 투입계획 조정 : 증 43일(당초 : 91일 → 변경 134일)

Ⅲ		계약금액 조정 검토

□ 물가변동으로 인한 계약 금액 조정

○ 관련근거

-「지방자치단체 용역계약 일반조건」제5절(용역의 착수 및 보고),

제6절(과업내용의 변경, 물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

-「지방자치단체 용역계약 특수조건」제21조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

-「동북선 도시철도 민간투자사업 실시협약」제56조(건설보조금)

- 입찰공고 서울특별시 재무공고 제2019-2315호 (’19.07.29.)

- 감리용역 물가변동 조정방법 검토보고(도시철도사업부-10869호, ’20.11.6.)

○ 소비자물가지수 변동율 : 증 1.25%

- 기준시점(’19.6-입찰공고 직전 월) : 104.88

- 비교시점(’20.9-지급대상 분기의 직전분기 말) : 106.20

소비자물가지수 변동율(%)	=	(비교시점 소비자물가지수 - 기준시점 소비자물가지수)					x	100
		기준시점 소비자물가지수
	=	(106.20 – 104.88)	x	100	=	1.25%
		104.88

※ 변동율 : 불변가격 기준시점(‘19.6)부터 지급대상 직전분기 말까지 소비자 물가지수 변동분

○ 소비자물가지수(E/S) 적용(‘20.9.30 기준) : 1차 1회

(단위 : 천원)

구분	계약 금액 (1차분)	조정 대상금액 ①	비 대 상 금 액			물가변동 대상금액 ③=①-②	변동율 (%) ④	물가변동액 ⑤=③x④	부가세 ⑥=⑤*(0.1)	투입 계획 조정	물가변동 금액 ⑦=⑤+⑥	비 고
			준공 또는 기성	부가세 및 손해보험	소 계 ②
E/S	*******	*******		***571	******	******	****	*****	***	*	*****53	·물가 변동 및 투입계획 조정 반영
										*****53	*

□ 건설사업관리기술인 투입계획 조정

○ 지장수목 제거, 지장물 이설, 토공 등에 따른 건설사업관리기술인 투입

- 투입인원 : 2명(단장 1명 ‘20.8.18, 보조 1명 ’20.9.1)

※ 상주 건설사업관리자 투입계획 보고(도시철도사업부-8210호, ’20.8.13.)

○ 건술사업관리기술인 투입계획 조정

- 총괄용역 : 변동 없음

- 1차 용역 : ***********************

구 분		총 괄 용 역			1 차 용 역
		당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
계		384.39 ***	384.39 ***	*	8.05 ***	8.36 ***	증 0.31 ***
토 목	특급	74.55 ***	74.55 ***	*	3.44 ***	5.04 ***	증1.60 ***
	고급	65.00 ***	65.00 ***	*	3.00 ***	-	감 3.00 ***
	중급	102.24 ***	102.24 ***	*	-	3.32 ***	증 3.32 ***
	초급	36.10 ***	36.10 ***	*	-	*	-
건 축	고급	16.00 ***	16.00 ***	*	-	*	-
	중급	13.63 ***	13.63 ***	*	-	*	-
기술지원 기 술 인	고급	76.87 ***	76.87 ***	*	1.61 ***	*	감 1.61 ***

□ 계약금액 조정내역

(단위 : 원, 부가세 포함)

구 분	계약금액	물가변동분	투입계획 조정	변경 계약금액	비 고
총차1회 분	5,249,900,000	*********	*	5,251,253,000	***********
1차1회 분	***********	*********	*********	***********	**************

Ⅳ		조 치 계 획

□ 상기 검토내용과 같이 기 계약된 용역계약 내용 중 과업내용서, 용역계약 특수조건의 물가변동 조정사항을 보완(추가)하고,

□ 물가변동(E/S) 반영 및 투입계획을 반영  ‘총괄(1회)’ 및 ‘1차(1회)’ 계약금액을 변경하여 연말 기성금(12월말 기준)을 지급하고자 함

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총차 1회	*******************	5,249,900	*******************	5,251,253	********* ******************** ********* ********************
1차 1회	*******************	*******	********************	*******	********* ****************** ********* ******************** ********************

붙 임 : 1. 건설사업관리단 계약변경요청 공문(관련 서류) 각 1부.

2. 관련공문 각 1부.  끝.