문서번호	교량안전과-17326
결재일자	2020. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이상문		박찬규	11/24 하현석
협조
	주무관		이우근

한남대교 정밀안전진단용역

추가과업 수행계획 보고

2020. 11.

한남대교 정밀안전진단용역 추가과업 수행계획 보고

개정된 시설물안전법(‘18.1월)에 따라 ’20년 한남대교(상류교) 정밀안전진단용역에 대하여 내진성능평가 추가과업 시행 계획을 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제2조 및제12조

□ 1종교량 정밀안전진단 추가과업 시행계획 보고(교량안전과-10090, ‘20.7.7)

⇒ 정밀안전진단 시 내진성능평가 실시(설계당시 내진설계 기준 적용)

Ⅱ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 한남대교(상류교) 정밀안전진단 및 양화교 정밀점검 용역

□ 용역기간 : 2020.05.15. ~ 2021.05.14.

□ 용 역 비 : *********

□ 용 역 사 : *************

Ⅲ		교량제원 및 내진설계 현황

□ 교량제원 및 구성(한남대교) - 성능개선시 내진설계 반영

구 분	본 교	램프 B	램프 D
준공일	1969년 최초준공, 2005년 성능개선	2005년 신설준공	1986년 최초준공, 2005년 성능개선
연 장	․ 총연장 : 919.121m ․ SPG교 : 919.121m (1@27.0) +(2@(40.4+50.0+40.4)) +(7@(3@30.0))	․ 연장 : 454.6m ․ STB교 : 239.6m (50.3+40.6+34.5+2@40.0+34.2) ․ SPG교 : 215.0m (40.0+3@45.0+40.0)	․ 연장 : 183.1m ․ STB교 : 153.1m (30.7+30.3+30.5+30.8+30.8) ․ RC Slab : 30.3m (3@10.0)
교 폭	25.7m(5차선)	6.65~7.65m(1차선)	7.5m(1차선)
상 부 구조형식	․ STB형 : h=1.5m	․ STB형 : h=2.0m ․ SPG형 : h=2.0m	․ STB형 : h=2.0m ․ RC Slab
받 침	포트받침, 납면진받침	포트받침, 탄성받침	면진받침, 탄성받침
신축이음	강핑거	강핑거	강핑거
교 각	π형 라멘식	T형	T형
기 초	․우물통(26기), 직접(1기)	․우물통(12기)	․우물통(6기), pile(2기)

□ 성능개선시 내진설계 적용 기준

○ 지진구역 : 지진구역 I 적용(서울특별시)

○ 구역계수 : 0.11적용(지진구역 I)

○ 내진등급 : 1등급(재현주기 1000년)

○ 위험도계수 : 1.4(1등급교)

○ 가속도계수 : A=0.154(위험도계수 * 지진구역 개수)

Ⅴ		조 치 계 획

□ 추가과업에 따른 계약금액 조정

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
***	*******	*******	*********

□ 예산활용 : 교량시설물 안전점검 및 진단 예산 집행 잔액

○ 예산과목 : 교량관리, 교량시설물 점검관리, 교량시설물 안전점검 및 진단,

시설비 및 부대비, 시설비

□ 추가과업 수행 지시 및 변경계약 시행

붙 임 : 1. 내진성능평가 과업 내용서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.