문서번호	건축부-19891
결재일자	2020. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
이원기		정채문	11/24 이창구
협조
	산업거점지원팀장		안명권

AI지원센터 건립 설계용역 계약변경(기간연장) 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(건축부)

AI지원센터 건립 설계용역

계약변경(기간연장) 검토보고

“AI지원센터 건립 설계용역” 과 관련, 설계자로부터 용역기간 연장 사유가 발생되어 검토(보고) 드림.

Ⅰ		용역현황

○ 용 역 명 : AI지원센터 건립 설계용역

○ 위    치 : 서초구 태봉로 101

○ 규    모 : 지하1층, 지상7층 연면적 9979.12㎡

○ 주 용 도 : 교육연구시설

○ 설 계 자 : ㈜에스티피엠제이건축사사무소 외 1개사

○ *********************

○ ******************************

Ⅱ		추진경위

○ '20.03.02.    : 설계용역 계약 및 착수

○ '20.04.13.    : 계획설계 완료

○ '20.04.21.    : 설계자문회의(1차) 개최(도기본)

○ '20.05.27.    : 경관심의(조건부의결)

○ '20.06.25.    : 서초구 건축심의(조건부의결)

○ '20.10.~11.  : 설계경제성검토 진행(10.28, 11.3, 11.9 3회)

○ '20.11.24.    : 계약기간 연장 요청 (설계자→건축부)

Ⅲ		계약변경 검토

○ 관련근거

- 용역기간 연장 요청[(주)에스티피엠제이건축사사무소 stpmj_no.2003_201124_A, ‘20.11.24.)

※ 지방자치단체 용역계약 일반조건 제14장제7절2호가. 계약기간의 연장[행안부예규 제114호]

○ 기간연장 요청내용

***	***	***	***	**
****	*********************	*********************	****

○ 기간연장 사유 및 기간

- *******************************

· **************************************************

· ******************************************************

○ 지체상금 :****

Ⅳ		처리의견

○ 주관부서의 평면계획 및 서버실 전기용량 변경 등 요청사항 반영에 따라 변경설계 기간 증 ***(연장) 처리하고자 함.

Ⅴ		향후계획

○ '*****************************

○ '****************

붙임 : 설계용역 기간연장 요청 서류(설계자) 각 1부.  끝.